투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(자원순환과장)
(경유)
제목	일정변경(공사기간) 알림(양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사)

1. 건축부-6782(2016.5.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』와 관련하여 아래와 같이 일정이 변경되어 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일정변경(공사기간)

- 당초 : `14.12.12~`16.6.11

- 변경 : `14.12.12~`16.7.21(증40일)

- 사유

‧ 지장물(도시가스배관 등) 이설, 우천 등으로 공사 지연

‧ 동절기 습식공사(방수/타일/미장/조적 등) 중지

‧ 안전, 품질 등을 위하여 불가피하게 일정변경

나. 향후 추진일정(예정)

- `16. 6 : 예비준공검사

- `16. 7 : 준공 및 시설물 인수‧인계

3. 아울러, 주요공사는 6월중 완료될 예정임을 알려드리니 내부 인테리어, 각종 시설배치, 시설관리자(전기, 소방) 지정 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★전문관	현승주		건축관리과장	곽동호		건축부장	05/27 안재혁
협조자
시행	건축부-6822	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2657	/전송	02-3708-2659	/	jhsjmm@seoul.go.kr	/	대시민공개