문서번호	도로관리과-8441
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	도로굴착관리팀장	도로관리과장	안전총괄관		안전총괄본부장
엄태용	김순수	배광환	이택근		05/27 김준기
협 조

’16년 도로굴착복구 시행도로 정비계획

2016. 5.

서울특별시 안전총괄본부

도로관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’16년 도로굴착복구 시행도로 정비계획

도로굴착복구 공사 시행 후 하자기간 만료된 구간 중 도로상태가 불량하여 차량통행에 불편을 초래하는 구간을 정비하여 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성하고자 함.

□ 정비개요

○ 대상 : 도로굴착복구 공사시행 구간 중 포장상태 불량한 지역

○ 예산 : 60억 원 (도로굴착복구기금 운영계획에 편성)

※ 최근 3년간 사후정비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	’13년		’14년		’15년
	규모	사업비	규모	사업비	규모	사업비
계	36개 노선 43개소 2,238.2a	4,193	27개 노선 39개소 1,921.1a	4,371	31개 노선 40개소 3,071.5a	5,553
동 부	3개 노선 5개소 346.8a	685	3개 노선 3개소 291a	600	2개 노선 4개소 639.7a	1,109
서 부	6개 노선 6개소 448a	733	5개 노선 7개소 372.4a	1,030	9개 노선 12개소 740.0a	1,350
남 부	7개 노선 7개소 488.2a	689	2개 노선 4개소 275.2a	600	4개 노선 6개소 281.6a	503
북 부	6개 노선 6개소 348.3a	745	3개 노선 3개소 250a	600	8개 노선 8개소 629.2a	1,256
성 동	8개 노선 11개소 302.0a	656	11개 노선 14개소 482a	941	3개 노선 4개소 435.5a	782
강 서	6개 노선 8개소 304.9a	685	3개 노선 8개소 250.5a	600	5개 노선 6개소 355.4a	553

□ 정비노선 조사

○ 포장이력 및 순찰조사

- 조 사 자 : 6개 도로사업소

- 조사기간 : ‘15.10.28. ~ 12.24.

- 조사내용 : 정비대상 노선 선정 및 정비 우선순위 검토

○ 포장상태 조사장비(PMS)에 의한 조사

- 조 사 자 : 품질시험소

- 조사기간 : ‘15.12.24. ~ ‘16.4.27.

- 조사대상 : 포장이력 및 조사결과 포장상태 불량구간

(27개노선, 59개소 , 연장 103.7㎞)

- 조사내용 : 포장면 상태(균열, 소성변형, 평탄성) 조사 및 분석

○ 현장 확인 조사

- 조 사 자 : 도로굴착관리팀

- 조사기간 : ‘16.5.9. ~ 5.20.

- 조사내용 : 정비대상 구간에 대한 포장상태 현장 확인

□ 정비노선 조사결과 분석

○ PMS 조사결과

(단위 : ㎞)

SPI 지수	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
4 미만	5.1				2.4	2.7
4~6	82.3	32.4	6.7		19.2	14.9	9.1
6 이상	16.3	15.0				1.3

※ SPI 지수에 따른 유지보수

□ 4 이하 : 보수․보강 필요	□ 4 ~ 6 : 적정보수 필요

□ 6 ~ 7 : 예방적 유지보수 필요     □ 7 이상 : 보수 불필요

○ 정비대상 선정기준

- PMS 조사결과 도로보수를 필요한 포장상태인 SPI 지수 6이하 노선을 선정

□ SPI 지수 6이상인 10 개소 16.3㎞는 정비대상에서 제외

- SPI 지수 6이하 노선 중 노후 포장도로 정비 시행구간과 굴착복구 공사규모가 적은 구간 및 육안 조사결과 도로상태 양호한 구간은 예산 범위 내에서 제외

□ 오금로 2 개소 10.2㎞

○ 정비대상 선정 : 23개노선 49개소 74.4km

※ PMS 조사결과 SPI지수 6이하 노선 중 예산 범위내 선정

구 분	신 청 현 황			조 정 현 황			비고
	연 장 (m)	포장면적 (㎡)	소요예산 (백만원)	연 장 (m)	포장면적 (㎡)	소요예산 (백만원)
계	103,697	387,126	8,374	74,387	272,726	6,000.0
동 부	47,380	181,519	3,812	22,160	81,219	1,786.8
서 부	6,721	29,707	890	6,721	29,707	653.6
남 부							대상물량 없음
북 부	21,620	75,020	1,672	18,820	65,220	1,434.8
성 동	18,886	69,572	1,531	17,596	65,272	1,436.0
강 서	9,090	31,308	469	9,090	31,308	688.8

□ 2016년 정비계획

○ 추진방향

- 서울형 도로포장 설계법에 의한 포장도로 내구성 증대

- 아스팔트 포장공사 품질향상으로 내구수명 증대

- 관리감독 강화로 시공품질 향상

○ 추진계획

- 아스팔트 포장공사 품질향상 추진

□ 1등급 골재 사용 및 소석회 첨가로 도로소파(소성변형, 포트홀) 저감

□ 소석회 사용 시 시험성적 제출 의무화

□ 현장조사(코아채취)를 통한 포장단면 설계로 내구성 증대

- 관리감독 강화에 의한 시공품질 향상

□ 열화상카메라에 의한 아스팔트 포장 다짐온도 관리로 고품질 확보

- 기타사항은 2016년 노후포장도로 정비계획에 준하여 정비시행

□ 행정사항

○ 중복굴착 방지를 위하여 사전 자치구 도로관리심의회 심의 협의
(도로사업소)

○ 사업예산(기금) 재배정 (도로관리과)

- 배정금액 : 60억원

- 예산과목 : 도로굴착복구기금, 안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비및부대비(시설비)

붙임 : 2016년 도로굴착복구 시행도로 정비대상 1부.   끝.