투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	잠원대림아파트재건축정비사업조합 조합장 이영미
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 연장 승인통보 (잠원대림아파트재건축정비사업)

1. 도로보수과-988(2016.2.24.), 잠원대림 2016-0523-05(2016.5.26.)호와 관련입니다.

2. 잠원대림앞파트 주택재건축 공사중「교통안전시설물(노면표시)원인자부담공사」의 공사기간 연장요청에 대해 아래와 같이 승인 통보합니다.

3. 또한, 최초 공사 승인시 안내(교통안전시설 설치공사 원인자준수사항)해드린 바와 같이, 준공기간내 미준공처리시 도로교통법 제68조(도로에서의 금지행위등) 및 동법 제149조(벌칙)에 의거 처벌될 수 있음을 알려드립니다.

- 아                 래 -

구 분	공사기간		요청사유	비 고 (T-GIS입력번호)
	당초	변경
노면표시공사	2016.2.24. ~2016.5.31	2016.2.24. ~2016.6.30	토목공사 지연에 따른 공기연장	2015-0207 -008

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	홍민표		도로보수과장	05/30 김준섭
협조자
시행	도로보수과-2931	(		)	접수		(		)
우			/	www.seoul.go.kr
전화	02-3284-5451	/전송	02-842-1634	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	대시민공개