투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(친환경 무동력 테마공원 타당성조사 용역)

1. 재무과-52190(‘15.10.27.)호와 관련입니다.

2. 서울대공원에서 추진중인  「친환경 무동력 테마공원 조성 타당성조사 용역」 와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울대공원 친환경 무동력 테마공원 조성 타당성조사 용역

나. 도급금액 :***************

다. 용역기간 : 2015.10.21. ~ 2016. 5.31.

라. 계약업체 : **************

마. 준공기한 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2016. 5.31.	2016. 6.30.

- 귀책소재 : 서울대공원

- 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 준공기한 연기사유

- ******************************************

*******************************

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부, 합의각서 1부(따로 보냄).   끝.

	서울대공원장
주무관	이옥하		전략기획실장	05/30 윤대진
협조자
시행	전략기획실-2418	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	500-7040	/전송	500-7019	/	okhalee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)