투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(제1회, 2016년 농축조 보수공사)

우리센터에서 시행하고 있는 “2016년 농축조 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 농축조 보수공사

나. 공사기간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 7. 29

다. 도 급 자 : 진두건설(주) 대표 김용호

라. 변경사유 : 현장여건에 따른 시공수량 증‧감(농축조 벽체 단면보수 규격                                변경, 붙임 설계변경 사유서 참조)

마. 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영관리, 공통분야유

지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 공 사 비

구분	당초금액	변경금액	증‧감	비고
총공사비	223.950,100	223,950,100	-
도급비	223.950,100	205,810,000	감 18,140,100
이설비및기타	0	18,140,100	증 18,140,100

첨부 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부. 끝.

시설팀장							김재봉				시설보수과장					김일운					난지물재생센터소장					05/30 최홍식
협조자				주무관							지두연					관리과장							조현태
시행			시설보수과-1572										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)																/
전화		02-300-8590							/전송			02-300-8587					/														/	대시민공개