문서번호	교통운영과-19635
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	교통개선팀장		교통운영과장		보행친화기획관		도시교통본부장
임홍필	유승효		강진동		김용남		10/12 신용목
협 조
	주무관					조혜진

서울역 주변 교통체계개선에 따른

모니터링 용역 발주 계획 보고

2015. 10

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울역 주변 교통체계개선에 따른 모니터링 용역 발주 계획

서울역 주변 교통체계 개선공사 시행에 따라 공사시행 전·후 서울역주변 도로에 발생되는 문제점에 대한 개선방안을 수립하고, 시민불편을 최소화하기 위한 모니터링 용역 발주 계획을 보고 드림.

□ 추진경위

○ ‘14.08.27 : 서울역 고가 프로젝트(가칭) 추진계획안 수립(시장 방침)

○ ‘14.09.05 : 서울역 주변 교통체계 개선대책 수립 추진계획(본부장 방침)

○ ‘14.10. ~ ’15.9 : 서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립용역 시행(교통운영과)

○ ‘15.06.25 : 교통안전시설 심의 2개소 가결(염천교교차로, 중림동교차로)

※ 서울역교차로,숙대입구교차로,숭례문삼거리교차로(가칭)은 심의 진행중

○ ‘15.06.30 : 서울역 주변 교차로 개선사업 시행 요청(교통운영과→도기본 토목부)

○ ‘15.08.07 : 서울역 주변 교차로 개선공사 착수(도기본 토목부)

□ 서울역 주변 교통체계개선공사 개요

○  위    치 : 중구 염천교 교차로 등 5개 교차로

○  규    모 : 서울역 주변 교차로 개선 4개소, 교차로 신설 1개소

- 개 선 : 서울역교차로, 중림동삼거리, 숙대입구교차로, 염천교사거리

- 신 설 : 숭례문삼거리 교차로(가칭)

○  사업기간 : 2015. 8. 7 ~ 2015. 12.31

○  총사업비 : 18억원

○  시행부서 : 도시기반시설본부 토목부, 설비부

□ 모니터링 시행 방안 검토

○ 모니터링 용역 시행

- 서울역 주변 교통체계개선공사 시행에 따라 서울역 주변 도로에 예상되는 문제점과 실제 개선공사 시행후 발생되는 문제점에 대한 개선방안을 수립하고, 교통량 조사, 교통영향분석 등을 통해 사업시행 효과을 극대화하기 위해서는 공사 시행 전·후에 대한 모니터링 용역 수행 필요

○ 모니터링 용역 개요

- 위 치 : 서울역 주변 주요 가로 및 교차로

· 가   로 : 통일로, 한강대로, 세종대로, 퇴계로, 청파로, 만리재로 등 15개 가로

· 교 차 로 : 서울역교차로, 염천교교차로, 중림동교차로 등 18개 교차로

- 규 모 : 서울역 주변 교통개선공사에 따른 모니터링 및 결과 도출

· 서울역 주변 교통개선공사 전․후 8개월간 모니터링 실시

(공사전 2개월, 공사완료후 6개월)

· 모니터링 분석결과 및 개선방안 도출, 보완공사 반영

- 용역비 : 150백만원

· 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역)

· 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및

안전관리강화, 도로교통 소통 개선, 시설비(401-01)

□ 행정사항

○ 보완공사 시행

- 모니터링 용역 결과에 따라 개선이 필요한 지점에 대한 개선방안을 도출하고    공사비 확보 및 공사 시행

□ 향후 추진계획

○ ‘15.  10월 : 기술용역 타당성 심사 및 용역 발주

○ ‘15.  11월 : 용역 계약 및 착수

○ ‘16.   6월 : 모니터링 용역 완료

첨 부 : 위치도 1부. 끝.