문서번호	교통운영과-3477
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
문기영		代이병운	02/25 강진동
협조

시청 옆 횡단보도 설치에 대한 추진계획 보고

2016. 2.

도시교통본부

(교통운영과)

시청 옆 횡단보도 설치에 대한 추진계획 보고

서울을 방문하는 역사문화공간 관광객 및 교통약자의 보행불편을 해소하고자 서울시청 주변 횡단보도 설치에 대한 추진계획을 마련하고 추진코자 함

□ 사업근거

□ ’16년 횡단보도․회전교차로 확충계획(교통운영과-1244호, ’16.1.21.)

□ ’16년 제1차 교통안전시설 심의결과 통보(교통관리과-1895호, ’16.1.22.)

□ 추진경위

□ ’15.6.     : 시청과 舊 국세청남대문별관을 잇는 횡단보도 요청

□ ’15.7.     : 횡단보도 신설 현장조사 및 기본설계

□ ’15.7.23.  : 횡단보도 신설 교통안전시설 심의 요청

□ ’15.8~12. : 횡단보도 신설에 따른 관계기관 협의

□ ’16.1.19.  : 시청 옆 횡단보도 신설 교통안전시설 심의 가결

□ ’16.2.26.  : 횡단보도 신설 실시설계 및 사업시행부서 협의

□ 사업개요

□ 사업지점 : 서울시청 옆

□ 사업기간 : ’16. 3. ~ ’16. 4.

□ 사 업 비 : 160,000천원

□ 사업내용

- 횡단보도 노면표시, 신호기 설치, 보도 턱 낮춤 등

□ 행정사항

□ ’16년 상반기 도로굴착사업계획 기간조정 외 도로굴착에 따른 굴착협조 요청(중구청 도로시설과)

- 보행신호등 연동케이블 매설에 따른 세종대로 ASP 횡단굴착

- 신호케이블 매설에 따른 보도 종단굴착

□ 횡단보도 신설구간 내 지하보도 출입구 일부로 저촉(4m)으로 인한 보행자 안전강화 조치

→ 지하보도 출입구를 피해 횡단보도를 건너는 사선보행자 교통안전을 위하여 보행자 방호울타리 설치 및 보행경로 안내 표지판 설치

※ 지하보도 출입구 폐쇄(’16년 하반기 예정)

□ 횡단보도 신설에 따른 개통행사 추진

※ 따로 추진계획 보고예정

□ 사업시행부서에 조기 공사발주 요청 및 예산 재배정

- 재배정예산 : 160,000천원

‣ 서부도로사업소 도로보수과 :  13,000,000원

‣ 서부도로사업소 기전과     : 125,000,000원

‣ 중구청 도로시설과         :  22,000,000원

- 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비(시설비)

□ 향후계획

□ ’16.2.29.~ : 예산 재배정

□ ’16.3.    ~ : 공사발주

□ ’16.4.3.~   : 사업완료

끝.