문서번호	시설과-1486
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
박도원	조대복	공헌구	03/09 심상원
협 조

부속온실 가스관 및 급수관 이설 계획
『 주보일러실 상부 토사 제거에 따른』 부속온실 가스관 및 급수관 이설 계획

2016년 3월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『주보일러실 상부 토사 제거에 따른』

부속온실 가스관 및 급수관 이설 계획

주보일러실 상부 토사 제거에 따른 부속온실에 공급되는 가스관 및 급수관 을 타 공정 일정에 맞쳐 이설코자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

○ 시설 현황

- 건축물: 부속온실 9개동

▪ 금차 4개동 철거 예정이며, 5개동은 계속 사용

- 가스설비 현황

▪ 부속온실 4개동에 가스매립 PE관 100mm 공급

▪ 계속사용 가스설비: 가스보일러 15만kcal/h 1대

▪ 철거예정 가스설비: 가스온풍기 75만kcal/h 1대, 가스온풍기 50만kcal/h 2대

- 급수설비 현황

▪ 부속온실별 급수관 XL관 20mm 공급(급수 주관은 25mm)

○ 문제점

- 주보일러실 상부 토심 하향 조정(30cm) 및 부속온실 4개동 철거에 따른 기존 가스관 및 급수관 이설 필요

Ⅱ		개선방안

○ 부속온실 1개동에 필요한 가스매립관(PE 63mm) 신설

○ 급수관은 기존 식물원관리동에서 분기관을 캡 마감 후, 주보일러실에서 신설 분기하여 부속온실 기존 급수주관에 연결

Ⅲ		세부 추진계획

○ 건축 토사 정리작업 이전에 선행 작업인 가스관 및 급수관 이설공사를 완료코자 함.

○ 소요 추정금액: 14,126천원

○ 건별 추정금액 및 계약방법

사 업 명	추정금액	예산과목	계약방법
부속온실 가스배관 이설공사	12,126	공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보존, 공원안전시설보수및정비, 시설비 (401-01), 건축시설물보수	수의계약
부속온실 급수관 이설공사	2,000		기계설비 연간단가 업체에 작업지시
합 계	14,126

Ⅳ		추진일정

○ 2016. 03. 18. 조경과에서 부속온실 4개동 철거 완료

○ 2016. 03. 21. 가스공사 계약체결

○ 2016. 03. 23. ~ 03. 24. 가스관 및 수도관 이설공사 완료.  끝.