투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사(1차)’ 공사기간 연기 의뢰

우리 본부에서 추진 중인 ‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비 공사’ 공사기간을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경(공사기간 연기) 내용

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비 공사(1차)
공사기간	총 차	2015.04.15.~2017.03.14.	2015.04.15.~2017.03.14.	변경 없음
	1차	2015.04.15.~2016.04.14.	2015.04.15.~2016.05.31.	47일
계약금액	총차	3,759,819,000원	3,759,819,000원	변경 없음
	1차	700,000,000원	700,000,000원
계 약 자		유엔아이건설주식회사

나. 변경사유 : 선행 공종(건축) 지연에 따른 후속 공종인 기계설비

공사기간 연기

붙임  1. 공사기간 연기 검토 보고서 1부.

2. 관련 문서(공사기간 연기 합의각서 포함) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 04/08 권오식
협조자
시행	설비부-5543	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개