문서번호	설비부-5530
결재일자	2016.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 04/08 권오식
협조

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’

공사기간 연기 검토보고

2016. 04.

도시기반시설본부

(설비부)

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’

공사기간 연기 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’ 관련, 공사기간 연기를 위한 건설사업단 검토내용을 검토하고 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사

❍ 공사규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡,

❍ 주요설비 : 공조·환기설비, 자동제어, 신재생에너지(지열) 및 소화설비 1식

❍ 공사기간 : 2015. 04. 15.~ 2017. 03.14.(총차)

2015. 04. 15.~ 2016. 04.14.(1차)

❍ 공사금액 : 3,759백만 원(1차 700백만 원)

❍ 시 공 사 : 유엔아이건설㈜

❍ 감 리 단 : ㈜선진엔지니어링(기계), ㈜영화키스톤건축사사무소(소방)

2		관련근거

❍ ㈜영화키스톤건축사사무소 서도기–건-45 : 1차분 공사기간 연기요청 보고

3		공사기간 연기내용

❍ 연기 사유

- 선행 공종(건축 골조) 지연에 따른 후속 공종인 기계설비 공사기간 연기

❍ 공사기간 연기 내용

공 사 명	계 약 자	계약구분	계약금액(원)	공사기간		비고
				당 초	변 경
어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사	유엔아이건설 주식회사	총 차	3,759,819,000	’15.04.15. ~ ’17.03.14.	’15.04.15. ~ ’17.03.14.	- 계약금액 및 공사기간 변경 없음
		1 차	700,000,000	’15.04.15. ~ ’16.04.14.	’15.04.15. ~ ’16.05.31.	- 계약금액 변경없음 - 47일 연기

❍ 공사 및 납품기한 연기 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 감리단 검토의견

- 선행 공종인 건축골조공사 지연으로 지열 및 위생배관 등의 설치 작업   수행을 할 수 없는 현장 여건으로 공사기간을 연기함이 타당하다고 판단됨.

4		조치의견

❍ 건설사업단의 검토 보고내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게   공사 기간을 연기하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함.

따로 붙임 : 공사기간 연기 관련 문서 1부.