함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고서 제출에 따른 회신(가락동 154번지 배급수관)

1. 공사감독2처-4516(2016.05.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독하는 『가락동 154번지 외 3개소 배급수관정비공사』의 3구간 현장실정보고서에 대하여 아래와 같이 회신하오니 감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상기구간은 D=300mm, D=150mm 이열배관으로 급수중인 지역으로 중간밸브가 없는 D=300mm에 임시밸브 2개소를 설치하여 단수로 인한 급수불편 최소화하여 주시고.

나. 이열배관(불용관)인 D=150mm, L=230m는 반드시 폐쇄후 기존관 정비실적에 반영하기 바라며.

다. 상기 사항을 향후 설계변경에 반영토록 하고 상수도 공사로 인한 주민불편사항이 발생치 않토록 안전 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김희철		주무관	한호진		급수운영과장	05/31 전명수
협조자
시행	급수운영과-10098	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-5149	/전송	02)3146-5189	/	huichul@seoul.go.kr	/	대시민공개