투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	공사 설계변경(정산) 시행 알림

「당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사」에 대하여 아래와 같이 공사 설계변경(정산)을 시행하고 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사

나. 계약기간 : 2015. 6. 19 ∼ 2016. 5. 31

다. 계약금액 : ₩4,189,790,000원

라. 도 급 자 : *****

마. 변경내용 :

구 분	금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
도급비	4,189,790,000	3,914,350,000	감)275,440,000

- 변경사유 : 현장 실정보고 및 하천점용허가 변경(토사반출 및 사석 감소) 사항 반영

첨부 : 1. 설계변경 방침(사본) 1부

2. 설계변경내역서 1부.   끝.

	기반시설과장
주무관	조운행		기반시설과장	05/31 박일연
협조자
시행	기반시설과-1988	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0649	/전송	02-3780-0774	/		/	부분공개(6)