투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	『중앙버스전용차로 흐름개선사업(구로세무서 앞) 교통신호기 공사-강서』 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

『중앙버스전용차로 흐름개선사업(구로세무서 앞) 교통신호기 공사-강서』에 대한 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 중앙버스전용차로 흐름개선사업(구로세무서 앞) 교통신호기 공사-강서

2. 계약번호 : 20151******** 01

3. 계약금액 : 금127,561,000원(금일억이천칠백오십육만일천원)

4. 계약업체 : 대선아이넷(주) 대표자 신일자

5. 착공년월일 : 2015.11.18.

6. 당초준공년월일 : 2016.06.04.

7. 변경준공년월일 : 2016.06.25.

8. 준공기한 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 절대공기 부족

9. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고,

버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 :  1. 준공기한 연기 시행공문 1부.

2. 방침서 1부.

3. 책임감리 기술검토의견서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	홍승찬		기전과장	05/31 代한영호
협조자	주무관	최승호
시행	기전과-6893	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개