투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	SH공사사장(전기공사부장)
(경유)
제목	교통신호기 원인자부담공사 변경승인 통보(내곡보금자리주택지구-신호)

1. SH공사 전기공사부-2079호(2016.05.30.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는 「내곡보금자리주택지구 택지조성사업 교통신호기

원인자부담공사」공사(승인)기한 변경승인에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 내곡보금자리주택지구 택지조성사업 교통신호기 원인자부담공사

나. 공사위치 : 서초구 내곡동 내곡보금자리주택지구 일원

다. 공사(승인)기간 : 승인일 ~ 2016. 11. 30

라. 원 인 자 : SH공사

구 분	설 계	감 리	시 공	원 인 자
교통신호기	도로교통공단	㈜대영유비텍	세희종합건설(주)	SH공사 (전기공사부)

마. 변경사항 : 공사(승인)기한 변경

공사(승인)기한		변경 사유	비 고
변경 전	변경 후
승인일 ~‘16.05.31	승인일 ~‘16.11.30	선행공정(토목공사) 지연에 따른 후속공정 지연

바. 승인조건

	승인 조건 사항
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 지주(H-BEAM, AL압출마감) 외 적용기준에 대하여는 「서울특별시 교통신호지주 제작설치 적용기준」에 따라 제작설치 - 교통신호제어기 신설시 통신(전송)선을 설치하여야 하며, 인근 제어기(200m이내)와 연동여부 협의(서울특별시지방경찰청 신호운영실) 후 설치 - 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호 점검구는 별도 분리 설치 - 교통신호제어기는 2010년형 개발자검사(호환성 검사포함) 완료한 제품 설치 및 개선된 잠금 장치(자동닫힘) 설치 - 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치 - 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설 - 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용 - 공사시행중 공사안내표지 및 신호수(모범운전자) 배치 등 안전준수사항 이행 철저 - DB 신청 및 변경시, DB 수령 및 입력 후 DB인수인계증』,『교통신호운영 정상 확인서』및『온라인 리포트』제출 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	05/31 남궁영주
협조자
시행	기전과-6404	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	부분공개(7)