문서번호	물재생시설과-7731
결재일자	2016.5.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	오폐수관리팀장	물재생시설과장
신귀식	김윤수	05/31 이철해

보험료 등 제경비 정산에 따른 계약변경 검토보고

보험료 등 제경비 정산에 따른 계약변경 검토보고

(도심명소의 정화조 공기공급장치 설치공사 - 1차지역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

물순환안전국

(물재생시설과)

보험료 등 제경비 정산에 따른 계약변경 검토보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75에 따라 제경비를 정산하기 위하여 아래와 같이 계약변경을 하고자 함.

□ 사업개요

○ 계 약 명 : 도심명소의 정화조 공기공급장치 설치공사

○ 설치물량 : 정화조 공기공급장치 100개소

○ 계약업체 : *******

○ 계 약 일 : 2016. 03. 11.

○ 계약금액 : 147,633,900원

○ 준공기한 : 2016. 05. 31.

□ 제경비 정산

○ 근거 : 행정자치부 예규 제35호「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

○ 정산대상 : 보험료(건강보험, 국민연금, 장기요양보험), 산업안전보건관리비

○ 정산방법 : 보험료의 납입금액을 확인하여 그 차액분을 당초 설계내역서

에서 감액 정산함.

○ 제경비 정산내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
국민건강보험료	1,045,288	0	△1,045,288
국민연금보험료	1,531,040	0	△1,531,040
노인장기요양보험료	68,466	0	△ 68,466
산업안전보건관리비	2,077,789	0	△2,077,789

□ 계약변경 내용

계약금액	당초	금147,633,900원
	변경	금142,439,000원
	증감	감 5,194,900원
계약기간	당초	2016년 3월 14일 ~ 2016년 5월 31일
	변경	상 동

□ 행정사항

○ 보험료 및 산업안전보건관리비 정산분만큼 감액하여 재무과에 변경계약 의뢰.

붙임 : 1. 계약금액 변경 확인서(계약업체) 1매.

2. 정산(감액)내역서 1부.

3. 기타 보험료(고용, 산재보험료) 납입증명서 1매.

4. 정화조 공기공급장치 설치명단(1차지역 100개소) 1부.  끝.