문서번호	도시철도토목부-6827
결재일자	2016.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		궤도과장	도시철도토목부장
성원배		윤방식	05/31 김진팔
협 조
	주무관			최경호

서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 감독권한대행등

건설사업관리용역(1차) 준공 정산 보고

2016. 5.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

서울하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 감독권한대행등

건설사업관리용역(1차) 준공 정산 보고

지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설(궤도공사) 감독권한대행등 건설사업관리용역(1차) 관리기술자 투입실정을 반영하여 준공하고자 함

- 관련문서 : 신승(개화) 제2016-78호(2016.05.23.) 용역 1차 준공실정 보고

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 용역 위치 : 서울시 강서구 개화동 개화역 일원

○ 용역 규모 : 궤도부설 L=5.107km, 분기기 부설 23틀

○ 계약 내용

- 계약자 : ㈜신승엔지니어링 외 1개사                          (단위 : 천원)

구 분	총 차	1차	2차	비고
계약금액	301,907	200,000	101,907
용역기간	‘16.01.05~‛16.09.02	‘16.01.01~05.23	‘16.05.24~09.02

□ 용역(1차) 인원투입 및 건설사업관리용역비 산정

○ 건설사업관리기술자 투입 현황

구분	용역 1차					비고
	계약		인원 투입		증․감
계	11.86		10.94		0.92
책임 건설사업관리기술자	4.61	10.3	4.61	9.38	0
분야 건설사업관리기술자	2.845		2.08		감 0.765
분야 건설사업관리기술자	2.845		2.69		감 0.155
기술지원 건설사업관리기술자	1.56		1.56		0

- 건설사업관리기술자 교체 사유(2회)

• 1회 : 퇴직      1명

• 2회 : 질병 발생 1명

○ 건설사업관리기술자 투입에 따른 용역비 산정               (단위 : 천원)

구 분		총 차	1차(준공)	2차(진행중)	비고
계약금액	당초	301,907	200,000	101,907	감 18,457
	변경	283,450	181,543	101,907
용역 기간		2016.01.05.~ 2016.09.02	2016.01.05.~ 2016.05.23	2016.05.24.~ 2016.09.02	변동 없음

□ 조치 의견

○ 건설사업관리기술자의 사정(퇴직, 질병발생)에 따른 건설사업관리기술자 교체투입시 까지 미 투입된 기간에 대하여 정산처리하여 준공코자 함.

붙임 : 1. 용역(1차) 준공 실정보고 및 검토의견서 각 1부.

2. 건설사업관리용역비(1차) 준공내역서 1 부. 끝.