과 장		06/01 김일운		팀 장	김재봉	심사자	김현곤	설계자	김재봉		설 계	심 사		결 재
											16년 4월 일	16년 4월 일
설 계 서
	설계변경 : 2016년 농축조 보수공사(제1회)
	구 분					당초금액				변경금액			증 ‧ 감
	총 공 사 비					223,950,100				223,950,100			-
	도급비		공 급 가 액			203,591,000				187,100,000			감 16,491,000
			부 가 가 치 세			20,359,100				18,710.000			감 1,649,100
			계			223,950,100				205,810,000			감 18,140,100
	관 급 비					-				-			-
	이 설 비					-				18,140,100			증 18,140,100
주요 설계변경내용 : 농축조 3-2지 단면복구보수(t=30mm) → 단면복구보수(t=20mm) 농축조 3-2지 단면복구보수(t=50mm) → 단면복구보수(t=30mm)