투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시 강남구 논현로 419 PMK빌딩 9층(역삼동 746) (주)펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사 김 수 호 귀하
(경유)
제목	재사용플라자 건립공사 건설사업관리기술자 배치계획 재수립 요청

1. PC16-311(2016. 5.31)호 및 건축부-5240(2016. 4.21)호, 건축부-4399

(3015. 4.16)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 용역중에 계신 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역 수행과 관련하여 2016. 5.31 현재 계획공정율 41.80%로 계획대비 실시 35.89%로  14.14% 공기지연되고 있으므로 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

현재 골조공사중으로 고소작업 실시에 따른 작업인부 및 자재낙하로 인하여 안전사고 발생이 예상되어 골조공사완료시까지 건설안전기술사를 추가 배치하여 작업인부등에 대한 안전관리에 철저를 기하도록 통보한 사항입니다.

3. 귀 사에서 2016. 5.31자 제출하신 재사용플라자 건설사업관리용역수행계획 보고는 상기 통보한 내용과 상이하게 건설사업관리 기술자 변경(배치계획)제출 사항에 대해 검토한 바, 동 공사를 감리하는 상주기술자는 골조공사 및 마감공사등 복합공정에 대한 원활한 업무추진이 필요하므로 관급공사등 감리 경험이 풍부한 기술자로 배치하여함을 알려드립니다.

4. 현재 연결데크 공사에 대하여 설계변경 추진, 변경계약, 2차수 준공등 건설사업관리단의 주요 현안사항이 많은 점을 감안하시어 건설사업관리기술자 배치계획을 재수립토록 요청하오니 협조하여 주시기 바라며, 공정관리등 용역 수행을 철저히하여 향후 건설사업관리업무 수행함에 있어 감독청에 재산상 손해가 발생되지 않도록 건설사업관리용역 계약 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	代김찬유		건축부장	06/01 안재혁
협조자
시행	건축부-7015	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)