투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사]

1. 기전과-4969(2016. 5. 23.)호 및 4986(2016. 5. 24.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 「2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사」를 아래와 같이 설계변경하여 추진하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2016. 3. 14. ~ 2016. 12. 31.

다. 시공업체 : 대림환경(주)  대표 김진만

라. 계약금액 : 금80,641,500원

마. 설계변경 내역

1) 변경금액

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감	비 고
도 급 비	80,641,500	137,801,500	57,160,000

2) 변경사유 : 교통사망사고 줄이기 사업, 자전거도로 유지보수 사업 등의

추진을 위해서 재배정된 예산을 기계약된 공사에 추가 반영

바. 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

교통사망사고 줄이기 사업, 시설비 : 1,080,000원

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

도로교통 소통 개선 사업, 시설비 : 4,300,000원

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설

확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 : 13,400,000원

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설

확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 : 30,990,000원

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설

확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 : 7,390,000원

붙 임 : 1. 관련 방침서 2부

2. 관련 문서(감리사 및 시공사 제출) 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	민성준		기전과장	이영목		북부도로사업소장	06/01 노영석
협조자	관리단속과장	代이강용
시행	기전과-5353	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3146-2229	/전송	02-3146-2239	/		/	대시민공개