투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(자원순환과장)
(경유)
제목	재사용플라자건립공사 공방 및 운영사무실 추가 설계계획(안) 검토의견 통보

1. 재사용플라자 건립공사와 관련 자원순환과의 공방 및 운영사무실 추가 설계계획(안) 검토회의(2016. 5.31)와 관련입니다.

2. 귀 부서의 재사용플라자 건립공사와 관련 공방 및 운영사무실 추가 설계계획(안)에 대하여 도기본(건축부,설비부)의 사전 검토의견을 아래와 같이 알려드리니, 2016. 6.15한 공방 및 운영사무실 추가 설계계획(안) 확정, 운영자 선정 및 설계자 선정되어 설계추진되어야 공사중단없이 귀 부서의 추가 설계계획(안) 검토가 가능함을 통보드리니 원활한 공사추진에 차질이 없도록 업무협조 바랍니다.

가. 검토의견(반영사항)

공사부서	검토의견(반영사항)	비 고
건축부 (건축)	‘16. 6.15한 : 운영안 확정(운영자 선정) 통보 및 설계자 선정하여 건축,기계,전기,소방,통신설계 의뢰하여 관련규정범위내 에서 공방 분할 개소등 설계변경 가능범위에 대한 조기 확정 필요 · 운영자 조기 선정하여 공방 분할 및 공방 내부 인테리어 설계시 운영자의 의견 반영 필요 ‘16. 6.30한 : 전기,설비분야 설계도서 확정 필요 · 녹색건축인증계획(최우수그린1등급), 에너지효율등급(1+등급), 장애물없는 생활환경인증(우수등급) 계획 재검토 요구됨 ‘16. 7.30한 : 건축분야 설계도서 확정 필요 건축,기계,전기,소방공사등 추가로 최소30일 공기연장 필요 (감리단 검토의견)	건설사업관리단 검토의견(첨부)
설비부 (기계,전기 통신,소방)	기계 : FCU 및 덕트기구 추가에 따른 공급열원 부족, 배관 관경 및 닥트규격이 확대되어 소방시설을 포함 전반 적인 재설계가 요구됨 · 녹색건축인증계획(최우수그린1등급), 에너지효율등급(1+등급) 재검토 요구됨 전기 : 공방분할 변경이 조기 확정 필요하며 재설계가 요구됨 · 공방 입주업체들의 전기기구 용량 확인 필요(380V, 5kw이상 기구등)

따로붙임 1. 공방 및 운영사무실 세부 추가설계계획(안) 건설사업관리단 검토서 1부.

2. 공방 및 운영사무실 세부 추가설계계획(안) 자원순환과 회의자료 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	代김찬유		건축부장	06/01 안재혁
협조자	주무관	이종근		주무관	곽용길
시행	건축부-7016	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)