문서번호	물재생계획과-7230
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
김일구	代배원영	06/02 하상문
협 조

사업내용 변경 승인요청에 따른 검토보고

(면목동 44-22~56-4간 일대 하수관로 개량)

2016. 6

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

사업내용 변경 승인요청에 따른 검토보고

중랑구에서 추진중인 ‘면목동 44-24~56-4가 일대 하수관로 개량’ 사업관련 사업내용 변경 승인요청이 있어 아래와 같이 보고드림

□ 사업현황

○  위    치 : 면목동 44-24～56-4 외 3개소

○  규    모 : 하수관로 개량 D=900~1,200mm, L=316m

○  사업기간 : 2016. 6. ～ 11.

○  총사업비 : 1,000백만원

□ 보고내용

○ 중랑구 사업내용 변경(안)

- 구간별 사업내용 변경

구 분		변경내용		비 고
		당 초	변 경
1. 면목동 44-24～56-4	D=1,000mm, L=151m	굴착	비굴착	교차로 횡단
2. 면목동 23-12～526-36	D=1,200mm, L=50m	굴착	비굴착
3. 망우동 133-13～134-2	D=1,500mm, L=30m	굴착	비굴차
4. 망우동 516-30～30-46	D=900～1,000mm, L=85m	굴착	굴착, 비굴착

- 변경 사유

: 당초 개착공법으로 계획하였으나, 하수관로 조사 및 상태평가 결과 C등급으로 교통량이 많은 교차로임을 고려하여 공법 변경

○ 검토결과

- 당초 교차로를 횡단하는 노후 하수관로를 굴착정비코자 계획하였으나, 하수관로 상태평가 결과 C등급으로 하수관로의 손상상태가 비교적 경미하여 비굴착으로 공법 변경 가능하며

- 교차로 일대 교통상황 등 시민불편 사항 발생 등을 고려할 때 굴착에서 비굴착으로 공법을 변경 타당함

- 공법 변경에 따라 발생된 잔여예산은 인근 지역의 역구배로 인한 배수 불량 구간의 하수관로 개량 시행

□ 조치계획

○ 사업내용 변경 승인 통보(서울시 → 중랑구)

붙 임 : 위치도 1 부.  끝.