문서번호	도로보수과-5193
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		이석재	06/02 노영석
협 조
	주무관			박성록
	주무관			최병수
	주무관			이승헌

서울시 탐사동공 결과

(2016.5.12.기준) 조치계획

2016. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

탐사동공 추가 결과 조치계획

서울시에서 도로함몰 예방대책 추진의 일환으로 도심지 주요지역에 대한 동공조사를 실시하고 그 결과 우리사업소로 통보된 탐사동공에 대한 조치계획 보고사항 임.

□ 추진 근거

❍ 탐사동공 원인조사 실시(2016.05.13. 도로관리과 → 탐사동공 관리대장 메일수신)

□ 탐사결과

❍ 노선별 탐사결과

노선명	합 계	A 급	B 급	C 급	비 고
계	19	12	6	1
창경궁로	3	1	1	1
지봉로	3	1	2
세종대로	1	1
삼일대로	3	2	1
사직로	5	3	2
돈화문로	1	1
새문안로	3	3

관리번호	등급	도로명	주 소	위치	동공규모 폭*연장*깊이(동공토피)	아스콘 두 께	비고
2015-1-095	A	창경궁로	종로구 인의동 48-24	1차선	1.1*0.7*0.43(0.15)	0.15
2015-1-096	C	창경궁로	종로구 원남동 152-2	2차선	0.6*0.8*0.87(0.56)	0.23
2015-1-097	B	창경궁로	종로구 원남동 152-2	3차선	0.9*0.9*0.50(0.40)	0.4
2015-1-098	B	지봉로	종로구 충신동 55-11	2차선	1.0*1.3*0.61(0.32)	0.15
2015-1-095	A	지봉로	종로구 숭인동 310	2차선	0.9*1.3*0.60(0.32)	0.16
2015-1-096	A	지봉로	종로구 창신동 261	1차선	0.8*0.9*0.45(0.18)	0.09
2015-1-097	A	세종대로	종로구 장사동 10	1차로	1.2*0.7*0.14(0.23)	0.23
2015-1-098	B	삼일대로	종로구 종로2가 37-3	2차로	0.6*0.6*0.29(0.22)	0.22
2015-1-099	B	사직로	종로구 내자동 74-5	1차로	0.6*0.9*0.32(0.32)	0.32
2015-1-100	A	사직로	종로구 내자동 74-5	1차로	0.5*1.2*0.21(0.23)	0.23
2015-2-019	A	사직료	종로구 내자동 122-1	1차로	0.7*0.9*0.3(0.32)	0.32
2015-2-020	A	돈화문로	종로구 관수동 62	3차로	0.6*1.2*0.21(0.22)	0.22
2015-2-021	A	삼일대로	종로구 운니동 114-24	1차로	1.0*0.6*0.36(0.3) (매설관로하부로동공연결)	0.3
2015-2-022	A	삼일대로	종로구 경운동 62-2	1차로	1.0*3.6*0.28(0.5)	0.5
2015-2-023	A	사직로	종로구 사직동 43-1	1차로	1.1*0.8*0.26(0.0.36)	0.36
2015-2-024	A	사직로	종로구 사직동 1-60	2차로	1.4*1.1*0.27(0.53)	0.53
2015-2-025	A	새문안로	종로구 신문로1가 12-2	4차로	1.1*0.8*0.28(0.26)	0.26
2015-2-026	B	새문안로	종로구 신문로2가 1-389	1차로	0.8*2.3*0.19(0.19)	0.19
2015-2-027	B	새문안로	종로구 신문로2가 1-2	1차로	0.6*2.4*0.19(0.15)	0.15

❍ 세부현황

❍ 등급 기준

등 급	등 재 기 준	비 고
A 급	동공 상부 지지층 두께 0.3m 이내	12개소
B 급	동공 상부 지지층 두께 0.3m 이상 동공 최소폭 0.5m 이상	6개소
C 급	A급 및 B급 제외 (안전율 A급의 3배)	1개소

□ 탐사결과 조치계획

❍ 굴착조사

- A,B.C 급 : 굴착 원인조사후 복구조치

❍ 흐름도

① 현장조사 ⇒ ② 동공지역 순찰강화 ⇒ ③ 지하매설물 확인

④ 동공 굴착 조사 ⇒ ⑤ 원인분석 ⇒ ⑥ 원인제거 및 도로복구

❍ 현장조사

- 현장 확인 후 동공 예상지역 노면 표시

- 지하매설물 관련 자료 조사

❍ 동공지역 순찰 강화

- 직  원  : 동공예상지역 수시 순찰 실시

- 작업반  : 도로보수 작업시 순찰 병행

❍ 지하매설물 확인

- 유관기관 지하매설물 유무 협의 및 현장 확인

- 대상 : 상·하수도, 전기, 가스, 통신 등

❍ 동공 굴착 조사 실시

- 기 간 : 2016.06.07.~6.10(4일)

- 방 법 : 긴급복구 연간단가업체에 의한 굴착 조사 실시 및 복구

- 규 모 : 동공 규모의 2배 정도 굴착 실시(최소폭 3m)

· 굴착후 원인 규명 가능하도록 굴착 규모 조정

- 입회자 : 서울시 담당자, 도로사업소 도로보수과 직원 4명

→ 박성록(7일), 최병수(8일), 최완(9일), 이승현(10일)

도로보수과 직원 1명 현장 입회

→ 유관기관 지하매설물 매설기관 참여

- 사전조치사항

· 동공 예상지역 굴착을 위한 경찰서 협의(도로공사 신고)

· 시험소 및 지하매설물 관리기관 굴착일정 사전 통보(유선 또는 메일)

❍ 원인분석

- 지하매설물 매설기관 의견 청취

- 주요 원인 확인 : 상·하수도 누수, 전기, 가스 등 지하매설물

❍ 원인 제거 및 복구

- 원인 확인시   : 원인기관에 원인 제거 및 복구 조치

- 원인 미확인시 : 지반 다짐 철저히 하여 복구 완료

□ 행정사항

❍ 교통통제를 위한 경찰서 협의

❍ 굴착결과 보고: 굴착 익일(원인조사 보고서 원본 메일송부요)

❍ 서울시 보고: 원인결과 수합 관리대장 송부(도로관리과)

붙  임  1. 탐사동공 관리대장 현황 1부.

2. 위치도, 사진. 1부.

3. 예시공문 1부    끝.