투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	원인자부담공사 변경승인「잠실역 버스환승센터 조성사업 관련 교통안전시설 설치공사」통보

1. 롯데건설(주) 롯건버스환승 제2016-237호(16.5.26.) 및 서울특별시지방경찰청 교통관리과-31931('14.11.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는「잠실역 버스환승센터 조성사업 관련 교통안전시설 설치공사」 준공기한 변경요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관계 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 관련 교통안전시설 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 송파대로 석촌호수 북단(석촌호수 교차로)

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2016.12.30.

라. 원 인 자 : 롯데건설(주)

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
교통신호	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜신한개발	롯데건설(주)

마. 변경사항 : 토목공사(구조물공사) 지연에 따른 준공일 연기요청

- 내  용

구 분	당초 준공일	연기 요청일	연기 사유	비 고
잠실역 버스환승센터 조성공사 (교통신호)	~2015.12.31.	~2016.12.30.	※ 토목공사(구조물공사) 지연에 따른 준공일 연기요청

바. 승인조건

	승인 조건 내용
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 교통신호제어기 신설시 통신(전송)선을 설치하여야 하며, 인근 제어기(200m이내)와 연동여부 협의(서울특별시지방경찰청 신호운영실) 후 설치 - 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호 점검구는 별도 분리 설치 - 교통신호제어기는 2010년형 개발자검사(호환성 검사포함) 완료한 제품 설치 및 개선된 잠금 장치(자동닫힘) 설치 - 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치 - 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설 - 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 공사시행중 공사안내표지 및 신호수(모범운전자) 배치 등 안전준수사항 이행 철저 - DB 신청 및 변경시, DB 수령 및 입력 후 DB인수인계증』,『교통신호운영 정상 확인서』및『온라인 리포트』제출 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

붙 임 : 1. 교통처리계획 통보(교통관리과-31931) 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	롯데건설(주)(버스환승센터 현장대리인),서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울송파경찰서장(교통과장)
★주무관	박태준		기전과장	06/02 남궁영주
협조자
시행	기전과-6575	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0367	/전송	02-2040-0365	/	ptj386@seoul.go.kr	/	부분공개(7)