문서번호	행정지원과-14858
결재일자	2016.6.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
방수진	김형국	代김형국		06/02 전영석
협 조

청사 다목적건물 공사관련

소통 간담회 개최 결과 보고

2016. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

청사 다목적건물 공사 관련

소통 간담회 개최 결과 보고

청사 다목적건물 증축 계획(행정지원과-21428,‘15.9.2)호 및 청사관련 소통간담회 개최 결과(행정지원과-14339,’16.5.30)관련 문제점 논의 및 소통과정을 거쳐 세부적인 공사 추진 방향을 모색하고자 함

		간담회 개요

일    시 : ‘16. 6. 2.(목)  09:30~10:30

장    소 : 남부수도사업소 2층 회의실

참석인원 : 총 20명

토의 주제  : 청사 다목적건물 증축 계획(행정지원과-21428,‘15.9.2)                      과 관련하여 관련 문제점에 대하여 소통과정을 거쳐                      해결방안을 도출하고자 함

진행순서

진행순서		진행내용	비고
09:30~09:40	10'	□ 청사 다목적건물 증축 추진경위 및 개최된 소통간담회 결과 내용 안내	행정관리팀장
09:40~10:30	50'	□ 청사 다목적건물 공사(안)에 대한 문제점 논의 및 해결방안 도출	참석 직원

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추 진 경 위

○ 본부장님 사업소 방문시(‘15.7.20,월) 직원 체력단련실 노후 개선의 시급한

문제점 해소를 위한 직원들 의견 건의

- 청사내 다목적별관의 노후에 따른 안전성 문제와 근무환경 개선을 위한 노후되고 협소한 체력단련실 증축안 건의 후 본부장님의 청사증축 즉시 시행 지시

○ 청사 다목적건물 증축 계획 수립 : 2015.9.2

○ 2016년 예산에 설계 용역비(1억 2천만원) 반영 됨

○ 청사 다목적건물 증축관련 소통 간담회 개최 : 2016.5.27

Ⅱ		증 축 계 획(당초)

□ 부 지 현 황

○ 위    치 : 동작구 여의대방로10길 97

○ 대지면적 : 5,951㎡

○ 중축규모 : 지상 3층, 옥상 (철근콘크리트조, 연면적 1,188㎡)

○ 층별 배치 현황(안)

- 1,2,3층은 체력단련실, 기간제근로자 등의 사무 및 휴게공간으로 조성하며

- 옥상은 정원 및 사각정자 등을 설치하여 시민개방형 열린 공간으로 활용

- 각 층별 면적 및 입주 대상

층 별	연면적(㎡)	사 용 현 황
계	1,188	총 11개소 입주
지상1층	396	계량기 창고(120), 아리수 병물 창고(16), 체력단련실(185), 남,여샤워실(60), 락커룸(15)
지상2층	396	수도계량기검침 사무실(280), 기간제 직원휴게실(56), 계량기 교체팀 (현업) 사무실(60)
지상3층	396	청사관리 공무직(남,여, 10명) 휴게실 및 샤워실(150), 감리사무실(110), 노조사무실(40), 아리수 수질검사원(96)
옥 상		옥상 정원 조성으로 방문 시민 및 직원들 휴식 공간으로 활용

□ 소 요 예 산

○ 총 사업비 : 2,872,685천원

구 분	계	설계비	감리비	공사비
금 액	2,872,685	120,857	32,496	2,719,332

Ⅲ		회의 내용

○ ‘16. 5. 27 기존 다목적 건물 공사 변경에 대한 소통 간담회 심층 논의

- 회의 결과 당초의 다목적건물  3층으로 신축 계획에서 규모를 축소하여

2층으로 개축 또는 내부 리모델링으로 변경공사 시행 결정에 따른 후속사항

으로  직원간의 회의를 거쳐 의견수렴하여 세부 문제점 등을 검토 후

최종 공사 설계방향을 결정하고자함

○ 탁구시설 공간 지상으로 이동 및 넓은 공간 확보 요청

- 현재 지하 강당에 설치된 탁구대 개수 및 공간은 다소 부족한 점이 있어 증축된다목적 건물로 탁구시설을 이동시켜 좀 더 넓은 공간에서 자유롭게 탁구 스포츠를 즐길 수 있도록 건의 (이혜숙)

- 탁구 시설 공간을 다목적건물로 이동 시키려면 다목적건물의 증축 공사가 불가피하며 예산편성 가능금액과 공사 추진 일정을 고려할 때 증축 공사는 어려운 점이 있음(김형국)

- 기존 강당의 탁구장을 이용하면서 특별히 불편한 점은 느끼지 못함(이향옥)

- 같은 시설을 이용하면서도 어떤 직원은 불편한 점을 느끼지 못하고 어떤 직원은 불편해 하는 등 서로 상이한 걸로 비추어 볼 때 탁구 시설 공간이 많이 불편하다고 판단되지는 않음(방수진)

- 모든 직원들이 넓은 공간에서 자유롭게 스포츠 활동을 할 수 있는 여건이 조성되면 더할 나위 없이 좋지만 다양한 스포츠 동호회 직원들을 모두 만족시키기에는 어려운 점이 있음(김형국)

- 서울시에서는 시민들이 공공시설물을 신청하여 이용하도록 권장하고 있는 바 체력 단련실 증축 시 인근 주민들 이용 신청 건수가 많을 것으로 예상되며 그에 따른 인력 관리 문제 및 불편함 예상(정풍년)

- 현재 탁구 시설 공간을 다목적 건물으로 이동하기에 어려운 점이 있다면 탁구 시설 공간(지하강당)을 마루바닥으로 교체하여 직원들의 스포츠 활동 시 안전 도모(이혜숙)

- 다목적건물로 이전하지 않고 기존 지하강당 탁구 시설을 이용하면서 탁구대,     탁구네트 교체  등 스포츠 장비 등을 새롭게 교체하여 직원들의 복지증지

향상에 힘써 주기를 바람(김영찬 외 다수)

- 스포츠 공간 시설외에 탁구,헬스기구, 라커시설 등 새로운 장비 교체로 직원복리후생 증진에 더욱 노력해 주시길 바람(정덕모)

- 사용 가능한 예산금액과 과목을 검토하여 스포츠 장비 교체 및 탁구 시설 공간

바닥을 마루바닥 교체 공사 될 수 있도록 최선을 다하고자 함(김형국)

○ 기존의 다목적 건물 신설공사 계획에서 리모델링 공사로 추진 방향 변경

- 당초 계획(안)인 3층 증축 공사에서 다소 축소한 2층으로 증축 공사 시 당초  계획(안)의 3층 증축 공사비 28억에 비하여는 축소된 금액이나 공사비 감소폭이 크지않고 본부 재무회계과에서도 공사비 편성에 대해 부정적임(김형국)

- 또한 당초 계획(안)인 3층 증축 공사에서 조금 축소한 2층으로 증축 공사 시 에도 설계 용역비가  수의계약 가능한 금액 1천 만원을 초과 하여 경쟁입찰 방법으로 추진할 수 밖에 없으며 추진 일정을 고려할 때 내년에 공사 착수는 힘들며 그 다음 해에 착수 가능(신민철)

- 2층 증축 공사 시 공사 착수 후 완공 시까지 8~12개월 소요되어 이기간 동안 직원들의 체력단련실 이용에 많은 불편함이 예상 됨(김영찬)

- 2층으로 증축 시 내년에 공사 착수가 힘들며 공사비 확보가 어렵다면 현실적으로 가능한 리모델링으로 공사 방향 변경하여 신속한 추진 요청

(이경희 외 다수)

○ 다목적건물 리모델링 공사 시 내부 체육시설 공간 최적의 배치로 효율적 공간 확보

- 다목적건물 리모델링 공사 시 내부 헬스 및 배드민턴 공간 최적의 배치로 효율적

공간 확보 되도록 적극적인 노력 요구(고신석외 다수)

Ⅳ		회의결과

○ 기존의 다목적건물  신축 계획에서 내부 리모델링으로 공사 설계 방향 변경

○ 설계용역 건축사와 충분한 검토를 거쳐 샤워장, 헬스장, 배드민턴장, 창고

시설물 최적의 재배치로 효율적인 공간 확보

○ 상수도사업본부 기획 예산과와 충분한 소통 및 협의로 적정한 예산편성

및 신속하고 효율적인 공사 추진

[별첨]

□ 소통 간담회 참석자 명단

연번	소 속	직위(직급)	성 명	서명
1	행정지원과	6	김형국
2	행정지원과	6	신민철
3	행정지원과	7	방수진
4	행정지원과	7	정풍년
5	행정지원과	6	서영식
6	요금과	7	김영미
7	요금과	7	전윤수
8	요금과	6	이혜숙
9	요금과	7	최 신
10	현장민원과	6	이규섭
11	현장민원과	7	이향옥
12	현장민원과	9	차광성
13	급수운영과	7	정덕모
14	급수운영과	6	강동철
15	급수운영과	6	이경희
16	시설관리과	6	고신석
17	시설관리과	6	권승계
18	시설관리과	7	김영찬
19	시설관리과	6	서규석
20	시설관리과	7	박창남

□ 간담회 사진