투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(도시가스 관종변경 실정보고건 승인)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트

2.작 성 일 자 : 2016-06-02 13:06:36

3.지 시 내 용:

1) 대한(하남) 제16-294호(2016.5.30.)와 관련입니다.

2) 우리본부에서 추진중인 「하남선(5호선 연장)1-2공구 건설공사」와 관련하여 본선구간 카톨릭노유자시설로 인입된 도시가스관을 매달기를 하기 위해서는 현재 매설된 도시가스관의 관종을 변경하여야 한다는 실정보고 사항에 대하여 별첨 보고서와 같이 승인하오니, 공사장 안전 및 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3) 본건은 원인자부담공사로 이설비를 납부하여야 하는바, 코원에너지에서 제출한 이설비공사의 도로복구비, 폐기물처리비 등을 현장조사하여 적정성여부를 검토하여 2016.6.9.일한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 보고서 1부.  끝.

주무관							임경태			토목3과장					06/02 김정수
협조자
시행			도시철도토목부-6931									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		3708-8785						/전송			3708-8756					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개