문서번호	토목부-11238
결재일자	2016.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	06/02 김영수
협조

가족길 연결 계단등 설치 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

가족길 연결 계단 설치등 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

본 도로와 가족길의 단절로 인해 보행불편이 예상됨에 따라 연결계단을 설치하여 보행불편을 해소하고, 우기시 물고임이 발생되는 가족길교 주변 포장도로의 경사를 조정하여 원활한 배수가 되도록 재포장을 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2016. 6.30. (총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사  ㈜수성엔지니어링

○ 공 정 율 : 93.3%, 도로 포장 준비중 (중층 및 표층)

실정보고

○ 본선 도로와 가족길 연결계단 설치 및 물고임 방지를 위한 일부 재포장 필요

1) 가족길 연결 계단 설치

- 본선과 가족길과의 연결로가 없어 보행자 불편등으로 가족길교 주변 절토사면에 계단을 설치하여 보행불편 해소 추진 필요

2) 가족길 주변 포장구배조정

- 가족길(B=6.0m, L=220m)구간만 포장 설계 되어있으나 신설된 가족길교와 기존 가족길의 도로 경사로 인해 우기시 물고임 발생되어 기존도로 일부구간을 재포장하여 원활한 배수 유도 추진 필요

3) 절토부상단 출입방지 휀스설치 및 수목식재

- 가족길 연결계단 주변이 3m 이상 단차가 발생됨에 따라 안전을 확보하기위해 휀스 및 관목 식재 필요

○ 물량 검토

공 종	규격	단위	수 량		증△감	비고
			당초	변경
5. 포 장 공
보조기층포설	T=20cm	㎥	83	6	△77
아스콘기층포설	#467, T=6cm	㎡	415	8	△387
아스콘중간층포설	#67, T=6cm	㎡	415	1750	1355
아스콘중간층포설	#67, T=6cm	㎡	415	1750	1355
6.부 대 공
계단 하부틀 설치		m	-	29	29
계단방부목 붙임	T30mm,W2.5m	㎡	-	139	139
목재형 계단난간설치	W1500*H1200	경간	-	45	45
관목 식재	H3.0XW0.3	주	-	1580	1580
Seedspray	절토부	㎡	-	267	267
메쉬휀스	H=2.0m	m	-	22	22

○ 사업비 검토                                             (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
5. 포 장 공	2,757	3,070	313
6. 부 대 공	-	62,109	62,109
직 접 공 사 비	2,757	65,179	62,422
간 접 공 사 비	788	20,912	20,124
공 급 가 액	3,545	86,091	82,546
부 가 가 치 세	355	8,609	8,254
도 급 액	3,900	94,700	90,800
관 급 자 재 비	20,790	32,660	11,870
총 공 사 비	24,690	127,360	102,670

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(92.75%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 시공사와 강제협의율(92.75%) 적용 협의완료

검토결과

○ 비용반영에 따른 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

○ 설계변경 소심의 자문결과에 따라 변경추진

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.