문서번호	도시철도토목부-6938
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	06/02 김진팔
협 조
	건축공사과장			김내환
	설비공사과장			황영일
	시설전기과장			代조영환
	주무관			전영부

『서울 지하철 9호선 921공구 건설공사』

책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄6회,6차3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.

도시철도 토목부

『서울 지하철 9호선 921공구 건설공사』

책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄6회,6차3회)

본부장 방침 도시철도-3969호(‘16.03.31)와 관련 “지하철 9호선 3단계건설 공기연장에 따른 책임감리 운영 검토보고”에 의하여 감리원 등급조정에 대한 설계변경 검토 보고 임.

※ 유신 감리16-486호(2016.05.26) 관련임

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 921공구건설공사 전면책임감리용역

○ 계 약 자 : - 토목,     전기 분야 ⇒ ㈜유신 박 찬 식

- 건축, 기계설비 분야 ⇒ ㈜태원건축기술단 건축사사무소

- 소방 분야           ⇒ ㈜한국소방 엔지니어링

○ 계약 및 집행현황                                      (단위 : 천원)

구 분	총 괄	기 집 행 (준 공)	6차 (금회)	잔여금액
		1차 ~ 5차
계약금액	5,728,689	2,748,939	969,200	2,010,550
용역기간	2009.11.18. ~2016.12.31	2009.11.18. ~ 2015.05.12	2015.05.13. ~2016.05.31	2015.03.19 ~2016.12.31

□ 추진경위

○ ‘16.03.31 : “지하철 9호선 3단계 공기연장에따른 전면책임감리 운영 검토보고” 본부장 방침(도철토목부-3969호)

- ‘16.04.01부터 감리원 등급조정(수석감리사⇒감리사,감리사⇒감리사보)배치

○ ‘16.04.01 : 전면책임감리용역 설계변경 지시(도철토목부-16-2350호)

- 총괄 및 차수 계약사항 등

□ 설계변경 내용

《 총괄 6회 》

○ 감리원 등급 조정 : 수석감리사 ⇒ 감리사, 감리사 ⇒ 감리사보

- 토목분야 등급 조정 ‘16.04.01부터 시행 및 집행

- 감리원 투입 인․월 : 500.274(변경 없음)

○ 분야별(토목, 건축, 기계설비, 전기, 소방) 감리원 투입계획 조정

- 당초 및 변경 투입계획(붙임 투입계획 참조)

○ 계약금액 및 기간 조정 : 변경 없음

《 6차 3회 》

○ 감리원 등급 조정 : 수석감리사 ⇒ 감리사, 감리사 ⇒ 감리사보

- 토목분야 등급 조정 ‘16.04.01부터 시행 및 집행

- 감리원 투입 인․월 : 당초 79.240⇒ 변경 78.642(변경)

○ 분야별(토목, 건축, 기계설비, 전기, 소방) 감리원 투입계획 조정

- 당초 및 변경 투입계획(붙임 투입계획 참조)

○ 사무원 기간 조정  : 증 57일(당초 12.591인․월⇒14.409인․월)

○ 월간보고서 비용 조정: 증 2회

○ 계약금액 조정 : 변경 없음

○ 감리용역기간 조정 : 증 57일(당초 ‘16.05.31⇒’16.07.26)

□ 설계변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증‧ 감	비고
계약 금액	총괄	5,728,689	변경없음	-
	6차	969,200	변경없음	-
공사 기한	총괄	2009.11.18 ~ 2016.12.31	변경없음	-
	6차	2015.05.13~ 2016.05.31.	2015.05.13~ 2016.07.26.	증 57일

※ 건축,기계,전기분야 감리투입 인원 및 비용 변경없음

□ 보고자 의견

○ “지하철 9호선 3단계 공기연장에 따른 전면책임감리 운영 검토보고” 본부장 방침에 의거 책임감리원으로부터 제출된 상기 설계변경 요청사항 등을 검토한 결과 책임감리원 검토의견 반영하여 921공구 전면책임감리용역(총괄6회 및 6차3회)의 설계변경을 금액 변경 조정없이 계약내용 변경사항 반영 변경계약 의뢰 조치하여 효율적인 감리업무 수행에 만전을 기하고자 합니다.

□ 조치계획

○ 상기 “감리용역 계약금액 변경(안)”과 같이 계약부서(재무과)에 계약변경 의뢰하고, 책임감리용역을 효율적으로 운영하고자 함.

첨부 1. 감리단 공문 1부.

2. 책임감리용역 변경내역서(총괄6회, 6차3회) 각 1부.   끝