문서번호	시설과-4127
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
김기수		남상국	06/02 김한준
협조

『2016년 중랑캠핑숲 시설정비공사』

준공기한 연기 검토보고

2016. 6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2016년 중랑캠핑숲 시설정비공사』

준공기한 연기 검토보고

“2016년 중랑캠핑숲 시설정비공사” 추진과 관련 공원내 보완사항 추가 반영에 따른 공사기한이 부족함에 따라 아래와 같이 공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 중랑캠핑숲 시설정비공사

❍ 공사기간 : 2016.4.29. ~ 2016.6.7.

❍ 도 급 액 : 금127,090,900원(금일억이천칠백구만구백원)

❍ 도 급 자 : ㈜홍림종합조경 대표 김윤기

검토사항

❍ 공사 준공기한 연기사유

- 공원시설 보완사항 추가 반영에 따른 설계변경 사항이 발생되어

공사기한이 부족함에 따라 불가피하게 준공기한을 연기하여 공사

추진에 만전을 다하고자 함.

❍ 공사 준공기한 연기

- 당초 : 2016. 4. 29. ~ 2016. 6. 7.

- 변경 : 2016. 4. 29. ~ 2016. 6. 24.

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 시민들에게 쾌적한 공원환경을 제공하고자 공원시설 보완사항 추가

반영에 따른 설계변경 사항이 발생되어 불가피하게 공사 준공기한

연기하여 추진에 만전을 다하고자 함.  끝.