	구로소방서
수신자	리드종합건축사 사무소 대표 조익수님, 장위건설주식회사 대표 유용수님
(경유)
제 목	구로소방서 여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수공사 설계변경 요청

1. 구로소방서 여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수공사 및 설계용역 수행에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 여직원 대기실 등 재배치 및 청사보수공사와 관련 공사현장의 여건 변동 및 사용부서의 청사활용의 편리성 등의 사유로 인한 요청사항과 향후 청사의 효율적 관리와 운영을 위하여 아래와 같이 요청하오니 사업추진을 할 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 요청사항

변 경 전	변 경 후	사 유
2층 소회의실 복도방향 벽면 철거	기존활용(미철거)	소음방지 등
2층 당직실1, 2, 여직원 당직실, 대기실 1, 2	당직실 1 우측으로 예방과 문서고 신설	민원서류보관
승강기 외부 출입구 경사로 우레탄 도색	경사로 주변 맨홀인상 및 대리석 마감	청사미관고려
2층 여직원, 출동 대기실 변경 없음	공무직 대기실 활용 벽, 천장 도배	환경개선
2, 3층 출입문, 휜지매입 부분 철거	휜지매입부분 폴리싱타일 23장 교체	복도방향

나. 검토사항 : 설계변경 타당성 검토 및 설계변경

○ 설계변경에 따른 공사비 증·감 내역(일위대가방식으로 산출)

○ 기타 공사추진 중 문제점 및 변경 증가사항 등 검토

3. 아울러 소방업무의 특수성을 감안 당초 준공예정일인 2016. 7. 14.이내  사업이 완료될 수 있도록 조속한 시일내 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  설계변경 위치변 도서 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	리드종합건축사사무소 대표 조익수,장위건설주식회사 대표 유용수
담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	윤봉수		소방서장	06/03 김송연
협조자
시행	소방행정과-8096	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개