투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	설계변경소위원회 심의 의뢰(공릉2빗물펌프장 신설공사)

1. 우리부에서 시행중인 「공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사」와 관련하여 설계변경 소위원회 심의를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 설계변경 소위원회 심의내용

(단위 : 천원)

공 사 명	심 의 내 용	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증.감
공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사	현장타설암거를 FRP복합구조암거로 변경	15,257	114,367	증)99,110
	Sheet Pile 사장	110,099	302,665	증)192,566

따로붙임 : 설계변경심의 요청서 각 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김학지		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	06/03 임춘근
협조자
시행	방재시설부-8372	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌등 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개