투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)신명건설기술공사 대표이사 귀하
(경유)
제목	전면책임감리용역 감리원 투입시기 변경(일시 철수) 시행 통보

1. 신명신사 제2016-118호(2016.5.17.), 신명건설사업 2016-230호(2016.5.19.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 「신사사거리~고양시계간 도로개설공사 전면책임감리용역」의 「변경계약(전체10회, 6차4회) 요청」과 관련 감리원 투입시기 변경(일시 철수)에 대하여 시행 통보하오니 향후 감리원 배치일정에 따라 재 투입될 수 있도록 감리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 감리원 투입시기 변경내용

- 관련근거 : 「감리원 투입시기 조정」[토목부-10068(‘16.5.19)호, -10681(‘16.5.26.)호]

- 대     상 : 책임감리원(1명), 기술지원감리원(4명)

- 계약기간(6차)

▸ 당  초 : ‘15. 7. 5. ~ 6.10.

▸ 변  경 : ‘15. 7. 5. ~ 6. 2. ~ 기간중 일시 철수 ~ 9.20.~26

※ 감리원 일시 철수기간(109일)

나. 일시 철수 기간 중 감리업체 협조 요청사항

- 구조물 및 공정에 중대한 영향을 미치는 현안사항 발생시 기술검토지원 등 조치

- 설계변경 계약금액 조정, 기성부분 준공검사 등 시행 및 제출

※ 상기사항 조치에 따른 소요비용 발생에 대하여는 상호 협의하여 처리.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최종구		교량건설과장	박용택		토목부장	06/03 김영수
협조자
시행	토목부-11358	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2577	/전송	02-3708-2599	/	cjg5905@seoul.go.kr	/	부분공개(5)