투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(생태육교 등 재설계 비용 반영 실정보고 승인 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2016-06-03 18:06:24

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-141호(2016.5.30.) 및 토목부-11406호(2016. 6. 3.)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 생태육교(파형강판) 재설계, 아리수동산 조성, 가재골입구 방음림 조성, 대우아파트 진 ·출입로 변경에 따라 주민요구 사항 반영 및 이면도로 종단인하 연장 등 재설계를 위한 설계도서 작성비용 반영을 위해 감리단에서 실정보고 한 내용에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인 통보하오니 증액되는 공사비에 대하여는 추후 본부 설계변경소위원회에 심의 상정하여 결과에 따라 설계변경에 반영하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					06/03 진재섭
협조자
시행			토목부-11419									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개