문서번호	방재시설부-8374
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	06/03 임춘근
협조

『경의선숲길 공원조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2016. 06

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

「경의선숲길 공원조성공사」에 소요되는 관급자재의 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 3.48km, 면적(A) 84,268㎡

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.6

○ 공 사 비 : 14,908백만원

Ⅱ

관급자재 계약 현황

납품요구번호	품 명	규 격	단위	수량			납품기한
				계약	검수	잔량
12-16-1-19620	레미콘	25-24-80	㎥	100	14	86	16.05.30
		25-18-80	㎥	100	57	43
		25-21-80	㎥	300	261	39

Ⅲ

납품기간 연기 사유

○ 납품기한 연기 사유

- 소요자재 투입시기 미도래

○ 납품기한 연기조치가 지연된 사유

- 착오로 적기에 연기조치 미실시

○ 귀책사유 : 발주처

○ 지체상금 : 미부과

○ 연기내역

납품요구번호	품 명	납 품 기 한		비 고
		변경전	변경후
12-16-1-19620	레미콘	2016.05.30	2016.06.30	소요자재 투입시기 미도래

Ⅳ

조치계획

○ 계약수량에 대하여 납품기한 연기조치 하여 공사시행에 만전을 기하고자      함.

붙임 : 관급자재 납품기한 연기요청서 1부.  끝.