함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행하고 있는『경찰청앞 교차로~서대문역사거리외 2개소 등 5건 교통소통대책 수립용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 경찰청앞 교차로~서대문역사거리외 2개소 등 5건 교통소통대책 수립용역

2. 계약업체 : *********************

3. 계약금액 : ***********

4. 준공기한 연기내역

가. 공사기간 : 당초 2016.04.11. ~ 2016.06.06

변경 2015.04.11. ~ 2016.07.29

나. 연기사유 : 교통심의위원회 심의에 따른 기간 소요로 용역기간 연장

다. 귀책소재 : 중부수도사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임문서 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	06/03 代김상웅
협조자
시행	급수운영과-11528	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개(7)