함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(사업장폐기물 처리용역 장기계속 연간단가)

우리 정수센터 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(계약번호 20151*******00)과 관련하여 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속 연간단가)

나. 계약업체 : 진명기업주식회사 대표 최환준 임송농산(주) 양기훈

다. 계약기간 : 2016.1.1 ~ 2016.5.31(총계약기간 : 2014.6.1.~2016.5.31.)

라. 계약금액 : 금1,122,434,420원(총부기계약금액 금2,283,304,100원)

마. 변경내역

- 계약금액변경

․ 당초 : 금1,122,434,420원(총부기금액 금2,283,304,100원)

· 변경 : 금443,226,190원(총부기금액 금1,604,095,870원)

- 차수별 물량조정                                               (단위:톤)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총물량		69,408	49,423	감 19,985
차수별	1차(2014)	12,408	12,408	0
	2차(2015)	23,343	23,343	0
	3차(2016)	33,657	13,672	감 19,985

- 물량조정에 따른 차수별 금액변경 내역                             (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		2,283,304,100	1,604,095,870	감679,208,230원
차수별	1차(2014)	400,987,340	400,987,340	0
	2차(2015)	759,882,340	759,882,340	0
	3차(2016)	1,122,434,420	443,226,190	감679,208,230원

바. 변경사유 : 계약기간 만료 및 3차수 처리물량 변동

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙 임 :  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서(전체, 3차수) 각1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김선례		정수과장	서한호		영등포아리수정수센터소장	06/07 임정규
협조자	행정관리과장	안창수		계약1팀장	김점선
시행	정수과-6685	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5648	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개