문서번호	도로보수과-5342
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		06/07 이규철
협 조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제3차)

2016.  06. 07(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제3차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2016. 02. 19. ~ 2016. 12. 31.

○ 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

○ 도 급 비 : 455,878,340원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제3차)

○ 작업위치 : 은평구 은평구청입구 교차로 외 31개소

○ 작업기간 : 2016. 04. 26. ~ 2016. 05. 30.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	49,402천원	39,172천원	감) 10,230천원
관급자재	33,345천원	27,111천원	감) 6,234천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	은평구 은평구청입구 교차로	749m	0m	감) 749m	하수공사로 재포장후 도색완료(원인자)
2	용산구 서빙고로 299	13m	13m	-
3	중구 중림동삼거리 ~ 서부역	49m	72m	증) 23m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
4	은평구 증산로 증산3교 교차로	272m	285m	증) 13m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
5	은평구 서오릉로 214, 선진운수앞	104m	0m	감) 104m	재도색 되어 있어 작업취소
6	은평구 연서로 200, 양평해장국 앞	44m	44m	-
7	은평구 연서로 215, 스텐다드은행 앞	10m	10m	-
8	서대문구 모래내지하차도 ~ 두산아파트 앞	15,033m	14,363m	감) 670m	원인자구간 작업제외, 퇴색구간 작업추가
9	중구 지하철2호선 시청역8번 출구	162m	150m	감) 12m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
10	용산구 한강대교 북단	533m	546m	증) 13m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
11	마포구 연희로48(연희철교 앞)	18m	102m	증) 84m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
12	용산구 삼각지역 9번 출구	240m	216m	감) 24m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
13	중구 중림동 서부역삼거리	191m	50m	감) 141m	원인자구간 작업제외
14	중구 소공로R 조선호텔 앞	10m	10m	-
15	마포구 마포대교 북단	899m	875m	감) 24m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
16	마포구 양화대교 북단	322m	0m	감) 322m	시설관리공단 구간 작업취소(강변북로)
17	중구 퇴계로 광희문 주변	160m	0m	감) 160m	재포장후 도색완료 (원인자)
18	용산구 이태원로 녹사평역 교차로	272m	246m	감) 26m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
19	용산구 서빙고로 이촌역 주변	48m	48m	-
20	은평구 진관119안전센터(은평소방서) 앞	276m	317m	증) 41m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
21	은평구 연서로 11-25, 삼천사입구	27m	35m	증) 8m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
22	중구 동호로 346 베이튼호텔 앞	44m	46m	증) 2m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
23	중구 을지로 시청광장 앞	51m	44m	감) 7m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
24	용산구 한강로3가 64	59m	72m	증) 13m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
25	은평구 서오릉로 108 ~ 서오릉로 134	5,082m	860m	감) 4,222m	일부구간 재포장후 도색완료(원인자)

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
26	마포구 마포대로 208 앞	852m	631m	감) 221m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
27	마포구 가양대로 구룡사거리~가양대교	892m	1,061m	증) 169m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
28	서대문구 서대문역 교차로	112m	120m	증) 8m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
29	용산구 한강대교북단(동부이촌동)	28m	29m	증) 1m	실 작업량 변동에 따른 물량 차이
30	용산구 동자동 43-153 번지 청파동입구	88m	88m	-
31	서대문구 응암로 54 북가좌초교 사거리	435m	243m	감) 192m	횡단보도 재도색되어 있어 퇴색구간 변경
32	중구 을지로 외 5개소(긴급포장)	666m	1,737m	감) 1,071m	긴급포장구간으로 실 작업량 변동
합 계		27,741m	22,313m	감) 5,428m

○ 변경사유

- 재포장 후 도색 완료되어 작업취소     :  2개소

- 중구청에서 재도색 완료하여 작업취소  :  1개소

- 시설관리공단 구간 작업취소(강변북로) :  1개소

- 원인자공사 중복으로 물량감소         :  2개소

- 포장공사구간 중복으로 물량감소       :  1개소

- 포장공사구간 중복으로 물량감소       :  1개소

- 횡단보도 퇴색구간으로 변경작업       :  1개소

- 실 작업량 변동에 따른 물량차이       : 17개소

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리.

붙 임 : 1. 제3차 작업완료 내역서 1부.

2. 제3차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제3차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.