문서번호	설비부-9017
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		김창균	06/07 권오식
협조

서울과학관 전기안전관리자 선임비용

설계변경 검토 보고

2016. 06.

도시기반시설본부

(설비부)

설계변경 검토 보고

「서울과학관 건립 전기공사」전기안전관리자 선임에 따른 설계 변경사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 서울과학관 건립 전기공사

❍ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 168

❍ 공사규모 : 지하1층/지상3층(연면적 12,330㎡)

❍ 주요설비 : 전력간선, 전등, 전열, 수전설비(1,500㎾)

❍ 공사기간 : 2014. 5. 8. ~ 2016. 6.25.

❍ 사 업 비 : 1,795백만원

2		관련근거

❍ 전기공사 설계변경 실정보고(정과감 제16-211, ‘16.6.2.)

- 전기 사용전검사 및 수배전설비 안전관리를 위해 전기안전관리자를 선임하고 이에 따른 비용지급 검토

3		검토결과

❍ 전기안전관리자 선임

- 선임기간 : 43일(‘16. 4.19 ~ ’16. 5.31)

- 선임사유 : 전기 사용전검사 및 전기설비관리(전기사업법 제73조)

- 선 임 자 : 과학관 전기공사 업체〔부민통신(주)〕

- 선임비용 : 금2,307천원(한국전기안전공사 전기안전관리대행 수수료 기준)

※ 2016. 6. 1자로 과학관 시설관리 위탁사업자로 전기안전관리자 변경 완료

❍ 전기안전관리자 선임 비용

- 감리의견 : 전기 사용전검사 및 수배전설비 등에 대한 안전관리를 위해 필요한 법적 의무사항으로서 내역에 반영함이 타당함.

4		조치의견

❍ 위와 같이 전기안전관리자 선임비용을 내역에 반영할 수 있도록 승인하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경 실정보고서 1부.  끝.