문서번호	시설보수과-2158
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/07 이종엽
협 조

준공기한 연기보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 건설폐기물 처리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소에서 추진중인 ‘시조사삼거리 교차로구간 개선공사 건설 폐기물 처리용역’을 시행 함에 있어, 본 공사 연기로 인한 준공기한   연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선공사 건설폐기물 처리용역

사업기간 : 2015.04.27. ~ 2016.06.30.

용 역 비 : 84,136,000원

용 역 사 : 우광개발㈜

Ⅱ		준공기한 연기

사  유

- 본 용역은 ‘시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사’에서 발생하는 건설폐기물 처리를 위한 용역으로, 본 공사의 준공기한을 연기함에 따른 공기 부족

기  간

- 당초 준공기한 : 2016.06.30.

- 변경 준공기한 : 2016.09.30.(92일 연장)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

상기 보고내용과 같이 공사에서 발생하는 건설폐기물 처리를 위하여 준공기한을 연기 조치하여 본 용역의 내실을 기하고자 함.

붙임  공사 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.