문서번호	기전과-6104
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
장병준		06/08 양영민
협조

2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6.  .

서부도로사업소

(기전과)

2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사 실정보고

『2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사 연간단가 감리업체로부터 1차 작업지시 공기연장 관련 실정보고가 있어 내용검토하고 아래와 같이 보고함.

□ 관련문서

○ ㈜건영이앤씨 건영 본 16-06-06호(2016.6.8.) - 감리 실정보고서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

○ 공사내용 : 교통안전표지 설치 1식(별첨)

○ 계약금액 : 금79,141,230원

○ 계약업체 : 천년스텐(주) 대표 양동석

○ 공사기간

- 전체 : 2016.3.9. ~ 2016.12.31.

- 1차  : 2016.4.14. ~ 2016.6.10

□ 보고내용

○ 노면도색 및 신호공사 등 선행공사 미작업으로 인해 작업기간내 작업불가

□ 조치의견

○ 1차 작업기간을 당초 2016.6.10.에서 2016.6.30.까지로 연장조치

첨 부 : 감리 실정보고서 1부. 끝.