투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전표지 1차 작업지시 공기연장 승인 통보

1. 기전과-3959호(2016.4.14.) 및 ㈜건영이앤씨 건영본16-06-06호(2016.6.8.)와 관련입니다.

2. 2016년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사 1차 작업지시 공기연장 요청과 관련하여 아래와 같이 연장 승인처리하였음을 알려드리니 공사(감리)에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : ‘16년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

나. 1차 작업지시 공사기간 연장

- 당 초 : 2016.4.14. ~ 6.10

- 변 경 : 2016.4.14. ~ 6.30. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	천년스텐(주),(주)건영이앤씨
주무관	장병준		기전과장	06/08 양영민
협조자
시행	기전과-6111	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	hijun39@seoul.go.kr	/	대시민공개