서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	건설폐기물처리 용역 설계변경(전체5회, 8차 1회 )시행 및 준공기한 연기 의뢰 (응봉교 확장 및 성능개선공사)

우리 본부에서 시행중인 “응봉교 확장 및 성능개선공사 건설폐기물 처리용역”에 대해 설계변경(전체5회,8차 1회)을 시행하고 아래와 같이 변경계약 및 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.  용 역 명  : 응봉교 확장 및 성능개선공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 ┏ 전체 : 2009. 1. 6. ~ 2016. 6.30.

┗  8차 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 6.30.

다. 용 역 비 : 전체 593,300천원 (8차 7,739천원)

라. 용 역 사 : 천마산업개발, ㈜원보

마. 설계변경 내역

○ 도급비

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
전체5회	593,300,000	660,832,000	증)67,532,000
8차 1회	7,739,000	75,271,000	증)67,532,000

바. 준공기한 연기내역

○ 공사기간

구 분	당 초	변 경	증 감
전체5회	2009. 1. 6.∼2016. 6.30	2009. 1. 6.∼2016. 8.31	증)62일
8차	2016. 1. 1.∼2016. 6.30	2016. 1. 1.∼2016. 8.31	증)62일

○ 연기사유 : 시설공사 준공기한 연기에 따른 용역기간 연장

○ 귀책소재 : 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

사. 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충,

응봉교재설치, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1) 폐기물처리 설계변경 검토 보고서 1부.

2) 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

3) 변경설계 내역서(전체 5회, 8차 1회) 1부.

4) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

5) 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정원		터널건설과장	권혁대		계약2팀장	홍연화		토목부장	06/08 代이동훈
협조자	주무관	지풍근
시행	토목부-11555	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)