문서번호	급수운영과-12044
결재일자	2016.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		박혁순	06/09 김수영
협조

- 공사 실정 보고 -

서울시청 도심형 아리수 음수대 설치공사(설비,전기)

2016. 06

중부수도사업소

(급수운영과)

- 공사 실정 보고 -

서울시청 도심형 아리수 음수대 설치공사(설비,전기)

“서울시청 도심형 아리수 음수대 설치공사(설비,전기)” 업무 추진과 관련, 정산에 따른 경미한 공사 설계 변경 사유가 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사개요

구 분	서울시청 도심형 아리수 음수대 설치공사		비 고
	설비	전기
공사개요	D=15mm, L=102m	D=2.5SQ, L=306m
공사기간	2016.05.18.~06.11	2016.05.18.~06.11
계약금액	5,010,505원	2,607,160원
도 급 자	이스코(주), 대표 이미심	삼창기전(주), 대표 박현규

2. 보고내용

서울시청 본관 청사내 급수관 설치 및 전선관 배관, 하수관 배관 등에 따른 정산 물량 증감(배관 거리 감소에 따른 소액 감액)

3. 보고자 의견

설계변경사유가 실 배관거리 일부 감소 및 자재 증감 등 시공 물량 증감 사항으로 최종 설계 변경시 정산처리함이 타당할 것으로 사료됨. 끝.