함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기획예산과장)
(경유)
제 목	청사 증축공사 설계비 등 부족 추가예산 교부 협조 요청

1. 행정지원과-12856(2016.06.08.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 청사 증축공사 설계공모 발주전 사업 전반에 대하여 전문가 검토 및 자체 심의위원회 심의결과 증축면적 확대 필요성이 대두되어 추가로 소요되는 설계비 등 부족 예산을

교부요청 하오니 검토 및 협조 하여 주시기 바랍니다.

가. 사업현황

○ 사 업 명 : 강서수도사업소 청사 증축 공사

○ 위    치 : 청사 주차장내(양천구 목동동로 155)

○ 증축규모 : 건축면적 200㎡(연면적 650㎡), 지하0층/지상4층(1층 필로티구조)

○ 총사업비 : 1,577백만원

○ 사업기간 : 2016.3 ~ 2017.12(설계-2016년, 공사-2017년)

○ 현재 진행 단계 : 설계공모전

나. 2016년도 예산현황

○ 설 계 비 : 71,455천원

○ 예산과목 : 자본적지출/유형자산취득/기계장치/서비스장비확충및환경개선/시설

비및부대비,시설비

다. 추가예산 소요 내역 : 42,105천원

○ 배    경 : 증축공사에 따른 건축전문가 자문회의 결과 자문위원 권고사항 및                                자체 심의위원회 심의결과 증축 연면적(당초 650㎡→변경 950㎡)                                확대 필요 반영

라. 부족 예산 확보

○ 남부수도사업소 증축공사비중 일부 사용

따로붙임 1. 청사 증축공사 심의위원회 개최결과(증축면적 확대) 1부.

2. 추가 소요예산 관련 방침서 1부.   끝.

	강서수도사업소장
주무관	전기우		행정관리팀장	손창두		행정지원과장	이원철		강서수도사업소장	06/09 이인걸
협조자	행정지원과장	이두영
시행	행정지원과-12940	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 행정관리팀	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	부분공개(5)