함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(3차-최종) 시행에 따른 계약의뢰(2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인 「2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차-최종)을 시행하고 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사

나. 계약상대자 : 하송종합건설㈜ 대표 장범식

다. 공사시간 : 총공사기간 : 2015.04.28 ~ 2016.06.30

라. 설계변경 금액내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		640,118,930	759,529,000	증)119,410,070
도급액	금차	109,539,930	159,341,000	증)49,801,070
	총차	570,118,930	619,920,000	증)49,801,070
관급자재비		70,000,000	139,609,000	증)69,609,000

마. 계약금액 변경사유 : 신규공종 발생 및 시공물량 증·감

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비

- 자본적지출,유형자산취득, 구축물,시설비

- 소방용수시설설치개소수,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설 설치

- 소방용수시설설치개소수,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설 보수

붙임 : 1. 설계변경 시행문 1부.

2. 계약금액 검토결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 및 보고서 1부.

4. 제비율검증서 및 합의서 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		주무관	함현준		급수운영과장	06/09 박길영
협조자	★계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-13806	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	부분공개(7)