문서번호	급수운영과-15528
결재일자	2016.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	06/10 代유명은
협조

단위공사 실정보고에 따른 검토보고

(등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사)

2016.06.

강서수도사업소

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2016년 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사

나. 공사위치 : 등촌역삼거리 ~ 양화교간

다. 공사개요 : D=200~700mm, L=1,348m

라. 공사기간 : 2016.05.02.~2016.12.15

마. 시 공 사 : 율토건설(주) 대표 조광일

바. 도 급 비 : 금843,085,790원

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶ 관련대호：공사감독2처-4433호(2016.05.26.)

연번	실정보고 내용	공단 검토의견	검토 결과
1	확인굴착 중 당초설계와 상이한 발견으로 추가 확인 굴착 및	추가 확인 굴착을 통해 지하매설물을 정확이 파악하여 신설관 노선을 선정하기 위해 추가 굴착 및	상수도관공사 추진에 지하매설물현황을 중요한 자료로써 추가 확인 굴착은 필요함(타당함)
2	A-1(20cm) 도로 하부에 철근콘크리트 확인 및 일부구간에 도종이 A-1(20cm) 표준두께 초과 부분 발견으로 폐기물량 증가	A-1도로 하부의 철근콘크리트 포장 일괄 컷팅 불가로 2회의 컷팅을 반영하고 A-1 표준 포장두께를 초과하는 부분의 추가 아스팔트 포장깨기 및 파쇄물 운반비를 반영	A-1 포장 하부에 철근콘크리트 포장이 있어 2회 컷팅이 타당하고 일부구간에 표준포장두께(20cm) 초과되는 부분은 정확한 폐기물 반출 및 처리를 위해 현장 실정 반영이 타당함
3	GIS 와 상이한 기존 배관 발견	정확히 위치 및 관종 파악을 위해 추가 확인 굴착 필요	현장과 상이한 위치에 상수도관 발견 유지관리를 위해 정확한 자료가 필요하여 추가 확인 굴착은 타당함

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고서 각 1부. 끝.