문서번호	급수운영과-15516
결재일자	2016.6.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	06/10 代유명은
협조

실 정 보 고 서

(등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사)

2016. 06

강서수도사업소

실 정 보 고 서

우리과에서 시행하는 『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』 와 관련 현장 실정 보고사항이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2016년 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관정비공사

○ 공사위치 : 등촌역삼거리 ~ 양화교간

○ 공사개요 : D=200~700mm, L =1,348m

○ 공사기간 : 2016. 4. 15 ~ 2016. 12. 15

○ 시 공 사 : 율토건설(주) 대표 조광일

○ 도 급 비 : 금843,085,790원

□ 보 고 내 용

○ 송배수관 부설공사 분기부 노후 제수변 정비(2곳)

○ 종점부 설계 변경

□ 조 사 내 용

○ 송배수관 부설공사 분기부 노후 제수변 정비(2곳) : 연결공사 후 통수과정 중 적수 발생 예상되어 정비 필요

위치도(노후제수변)	위치도(노후제수변)

○ 종점부 설계 변경

▫ 당초 : 도면 심사시 기존관 퇴수변으로 활용(상수도본부(배수과)의 검토결과)

<문제점>

- 기존 상수도관(SP,1977)은 노후도가 심하여 누수로 인한 유수율 감소와

노후밸브 교체 등 유지관리에 어려움을 있음

• 노후관 현황 : D = 700mm, L=187m(SP,1977), D=400mm, L = 85m(SP,1977)

▫ 변경 : 종점부 퇴수변 활용의 문제점을 상수도본부(배수과) 재협의하여

종점부 설계를 변경

• 설계 변경(안) : 기존노후관 퇴수변 활용 → 노후관 폐쇄(충진)

당초 설계	변경계획

• 배관상세도

당초 설계	배 관 상 세 도(변경)

□ 조치 의견

○ 위와 같은 현장 실정 사항을 현장여건에 적합하게 시공될 수 있도록 아래와 같이 조치코자 합니다.

▫ 실정내용 : 송배수관 주변 노후 제수변 정비, 종점부 설계변경

▫ 감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

▫ 시공지시 : 실정보고사항을 시공에 반영

붙 임. 1) 설계변경 1부. 끝.