문서번호	방재시설부-8766
결재일자	2016.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	06/12 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

하수암거 구조 안정성 검토보고

2016. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

하수암거 구조 안정성 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 기존 하수암거와 신설하수암거 연결부구조 안정성에 대한 시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2016. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 7,747백만원

실정보고 및 검토내용

❍ 상기 현장의 신설유입관로는 기존 하수암거 벽체부분을 제거 후 접합하도록

설계되어 있고,

❍ 접합되는 기존하수암거가 2련 박스로 되어 있어 신설된 하수암거로 원할히

하수를 유입하기 위해서는 기존박스 폐합 및 2련박스의 중벽을 철거가

필요한 실정이나

❍ 기존하수암거 접합부 및 중벽철거에 따른 기존하수암거의 구조검토가 안되어

있어 기존하수암거에 대한 시설물의 안정성 검토가 필요한 실정이며

❍ 원설계자 의견조회결과 구조안정성 검토가 선행되어야 한다는 의견이 회신됨

- 관련공문 : 도화(수자원)-2016-A20-0318호(2015.04.12.)

· 기존 관거의 벽체만 제거하므로 기존 관거의 안정성 검토가 필요

전체 평면도
연결부 상세도	박스 연결부 기존박스 차단 중벽 철거구간

감리검토내용

❍ 원설계자 검토 의견과 같이 기존 하수암거의 구조안정성 검토가 필요하므로 추가 구조검토 및 보강설계 비용을 반영코자 하며,

❍ “시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침”(국토교통부 고시,

제2015-467호)에 의거 하수암거 2련, 높이 1.5~2.5m, 폭 3m미만으로

추가 계상비용을 산정함이 적정할 것으로 판단됨

❍ 견적대비표(부가가치세 별도)

구 분	금 액 (원)
	국토교통부고시 설계가	건설표준시험원	엠코어 엔지니어링	민엔지니어링
하수암거 안정성 검토 및 보강설계	46,000,000	42,000,000	49,000,000	46,000,000
낙찰율적용		35,955,780
검토 안		◎

❍ 개략용역비 : 증)35,950,000원(부가가치세 별도)

보고자 의견

❍ 상기 내용을 검토한 결과 서울시시설관리공단 위탁감독 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함

붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고 검토서 1부.

2. 내역서 등 관련자료 1부. 끝.