문서번호	방재시설부-8767
결재일자	2016.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
손병도		김인숙	전결 06/12 임춘근
협조	방재시설과장		이도헌
	주무관		박계현

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간)』

건설사업관리기술자 배치변경 검토보고

2016. 6.

방재시설부

- 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계구간) -

건설사업관리기술자 배치변경 검토보고

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계) 계약사로부터 공정계획 변경에 따른 건설사업관리기술자의 탄력적인 운영을 위하여 건설사업관리기술자의 배치변경 요청이 있어 검토결과를 보고드림 - 관련근거 : 선진경춘감-16-348(2016.6.9.)호 -
		lll

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)(전면책임)

○ 과업위치 : 경춘선 폐선부지 공원조성 2,3단계 구간, 경춘철교정비

- 2단계 : 경춘철교~산업대3길 고가철교(L=1.1㎞)

- 3단계 : 육사삼거리~서울시계, 광운대역 주변(L=3.0㎞)

- 경춘철교 정비 L=176.5m

○ 내    용 : 공원조성(조경/토목/건축/전기/통신/폐기물처리용역 등) 건설사업관리

○ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.6.10.(1차분 2016.7.31.)

○ 용 역 비 : 1,188,900천원(1차분 763,924천원)

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성엔지니어링, ㈜진전기엔지니어링

□ 건설사업관리기술자 배치변경

○ 변경사유

- 경춘철교 정비공사 준공기한 연기에 따른 조정(’16.5.23 ⇒ ’16.7.16)

- 민원발생으로 공사가 중지된 과기대 입구 고가철교의 보완설계 및 객차동, 공릉지하보도의 건축분야 보완설계에 따른 배치기간 조정 등

○ 분야별 건설사업관리기술자 배치변경 현황(전체분)

분 야	등 급	전체분(투입개월)			비 고
		당초	변경	증·△감
계		99.73	99.73	-	계약금액 변경없음
책임건설사업관리기술자	고 급	26.00	26.00	-
조 경	중 급	16.00	16.00	-
조 경	초 급	9.50	2.00	△7.50
토 목	중 급	22.50	22.50	-
토 목	초 급	5.00	9.30	4.30
건 축	중 급	7.00	8.42	1.42
기 계	중 급	5.50	5.50	-
전 기	특 급	5.00	5.64	0.64
정보통신	중 급	3.23	4.37	1.14
비상주(분야별)	특급	26.00	26.00	-

○ 분야별 건설사업관리기술자 배치변경 현황(1차분)

분 야	등 급	1차분(투입개월)			비 고
		당초	변경	증·△감
계		55.73	57.95	-	2차분 투입개월을 1차분으로 일부 변경한 사항으로 1차분 완수일(’16.7.31)전 정산조치 예정
책임건설사업관리기술자	고 급	16.00	16.00	-
조 경	중 급	6.00	6.00	-
조 경	초 급	3.00	2.00	△1.00
토 목	중 급	12.50	12.50	-
토 목	초 급	5.00	7.30	2.30
건 축	중 급	3.00	4.42	1.42
기 계	중 급	2.50	2.50	-
전 기	특 급	4.50	4.00	△0.50
정보통신	중 급	3.23	3.23	-
비상주(분야별)	특급	16.00	26.00	-

○ 건설사업관리기술자 투입일자 변경 현황(전체분)

분 야	등 급	당초배치일	변경배치일	철수예정일	변경철수예정일	비 고
책임건설사업 관리 기술자	고 급	’15.04.13	’15.04.13	’17.06.10	’17.06.10	변경없음
조 경	중 급	’16.02.01	’16.02.01	’17.06.10	’17.06.10	변경없음
조 경	초 급	’16.04.01	’16.04.01	’17.06.10	’16.05.31
토 목	중 급	’15.07.22	’15.07.22	’17.06.10	’17.06.10	변경없음
토 목	초 급	’15.12.21	’16.12.21	’16.05.21	’16.09.30
건 축	중 급	’16.03.18	’16.03.18	’16.12.31	’17.01.31
기 계	중 급	’16.03.15	’16.04.01	’16.12.31	’17.01.31
전 기	특 급	’16.03.15	’16.04.01	’16.08.15	’16.09.20
정보통신	중 급	’16.04.28	’16.04.28	’16.07.31	’16.09.05

□ 건설사업관리기술단 의견

○ 경춘철교 정비공사의 준공기한 연장(’16.5.23⇒’16.7.16.)과 2단계 공원조성공사 중 과기대3길 고가철교 민원에 의한 교량 재설계, 객차 및 공릉지하보도의 사용자 요구(노원구청, 하계2동 주민센터)에 의한 협의기간을 감안하여 재조정하였고, 전기 및 통신분야는 경춘철교 및 2단계 공원조성공사 준공기한에 맞추어도 배치기간이 부족한 실정으로 잔여 투입개월 반영

○ 금번 건설사업관리기술자의 배치변경으로 전체분 계약금액은 변경이 없으나, 2차분 투입 예정 개월수를 1차분으로 일부 조정으로 1차분 계약금액이 변경되는 사항은 1차분 완수기한인 2016.7.31. 전까지 정산 조치토록 하겠음.

□ 보고자 의견

○『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』건설사업관리기술자의 배치변경사항에 대하여 현장여건 및 공정계획을 검토한 결과, 조정이 타당한 것으로 판단되어 배치변경을 승인하고자 함.

붙  임  건설사업관리기술자 배치변경 승인요청서 1부.  끝.