문서번호	시설관리과-15581
결재일자	2016.6.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박상열		최재영	06/13 최명익
협조

급수공사 작업기한 연기보고

[*********** 외 개소]

2016. 5.

명에 의하여 동대문구 관내 지역담당 업무수행 중 공사기간 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

		공사현황

❍ 공 사 명 : 2015년 제기동 외 6개동 상수도공사

❍ 도 급 자 :**************

연번	위 치	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	**********	***	`16.06.01.~`16.06.10.	신설 - 161
2	***********	***	`16.06.01.~`16.06.10.	신설 - 162

		보고내용

❍ 급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 공사기한 연기가 필요한 실정임

연번	위 치	보고내용(연기사유)	연기요청기간
1	**********	현장내 타공정 지연에 따른 작업기한 연기	2016.06.20.
2	***********	신축현장 타공정 지연에 따른 작업기한 연기	2016.06.20.

		조치의견

❍  신축현장 타공정 지연 등 공사기간내 작업 불가한 건에 대하여 준공기한을 연기하여 급수공사 업무에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위 치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	**********	`16.06.01.~`16.06.10.	`16.06.01.~`16.06.20.
2	***********	`16.06.01.~`16.06.10.	`16.06.01.~`16.06.20.

		귀책사유 : 동부수도사업소

		지체상금 부과여부 : 미부과. 끝.