문서번호	도로보수과-5519
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	06/13 代박종윤
협조
	주무관		이상하

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제1차)

2016.  06. 13(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사규모

- 노면표시 도색 및 제거   L= 240,186m

- 도로표지병 설치 및 철거 N=       91개

○ 계약기간 : 2016. 02. 19 ~ 2016. 12. 31

○ 시 공 사 : 미성건설(주) 대표 김지성

○ 총공사비 : 742,536,440원(관급자재 포함)

□ 설계변경 사유

○ `16년도 횡단보도 확충정비사업 시행요청 및 예산 재배정(시청 옆) (교통운영과-3521, 2016.02.29) - 12,000천원

- 중구 세종대로 서울시청과 시의회 사이 횡단보도 설치 교통개선사업으로 긴급히 공사를 완료하여 보행자의 안전을 도모하고자 기 시행중에 있는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 연간단가에 포함하여 시행.

○ `16년 도로교통소통개선사업 공사시행 요청 및 예산 재배정 알림 (교통운영과-4826, 2016.03.17) - 60,370천원

- 은평구 증산로 증산지하차도 앞 중앙분리대 설치 교통개선사업으로 긴급히 공사를 완료하여 교통소통을 원활히 도모하고자 기 시행중에 있는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 연간단가에 포함하여 시행.

○ 보행자 무단횡단예방시설 설치 등 사업예산 재배정 및 사업추진 협조요청(교통운영과-6953, 2016.04.15) - 37,178천원

- 은평구 응암로 응암오거리~은현교회 간 무단횡단 사망사고 지점으로 무단횡단금지시설 설치 교통개선사업으로 긴급히 공사를 완료하여 보행자 교통사망사고 예방을 도모하고자 기 시행중에 있는 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 연간단가에 포함하여 시행.

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	742,536,440	790,151,360	증) 47,614,920
도 급 비	455,878,340	495,401,300	증) 39,522,960
관급자재비	286,658,100	294,750,060	증) 8,091,960

○ 주요공정 및 수량 변경내역

공 정 명	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시 도색	m	18,611	23,665	증) 5,054
노면표시 재도색	m	214,766	215,721	증) 955
노면표시 제거	m	6,805	9,923	증) 3,118
차로밑그림 도색	m	4	4	-
도로표지병 설치	개	19	19	-
도로표지병 철거	개	72	72	-
합 계		240,277	249,526	증) 9,249

○ 예산별 집행내역

(단위 : 원)

공 사 명	예산배정액	발주 집행액		잔 액	비 고
		도급비	관급자재
횡단보도 확충정비	12,000,000	12,000,000		0
		9,558,960	2,441,040
도로교통 소통개선	60,370,000	15,124,140		45,245,860	교통부속물 유지보수공사 집행
		12,254,000	2,870,140
교통사고 잦은곳	37,178,000	20,490,780		16,687,220	무단횡단금지시설 구매 설치
		17,710,000	2,780,780

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비(9,558,960원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(12,254,000원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고잦은곳 개선사업, 시설비(17,710,000원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 붙임 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 변경 설계내역서(제1차) 1부.  끝.